투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	서울지하철9호선3단계 922공구 건설공사 전면책임감리용역 총괄 계약금액 변경 및 8차 용역 계약의뢰

우리본부에서 시행중인 「서울 지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사 전면책임감리용역」총괄(8회) 계약금액 변경 및 8차 발주 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 서울 지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사 전면책임감리용역

2. 계 약 자 : ㈜선진엔지니어링 대표이사 김동수 외 2개사

3. 계약금액 : 총괄) 4,400,762,000원

8차) 788,000,000원

4. 용역기간 : 총괄) 2010.08.05. ~ 2018.12.31.

8차) 착공일로부터 ~ 2018.12.31.

5. 용역계약 및 변경 현황

○ 총괄(8회) 계약금액 변경

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
계약금액	4,400,762	5,188,762	증)788,000	원인자 부담금공사 용역 포함
용역기간	‘10.08.05 ~ ‘18.12.31	변경없음

○ 8차 용역발주

(단위 : 천원)

구 분	계약금액	용역기간	비 고
8차	788,000	착수일~‘18.12.31

6. 변경사유

- 우리시와 둔촌주공 주택재건축조합과 협약으로 확보된 원인자 부담금으로 기 계약 시행중인 「서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사 전면책임감리용역」에 포함시행

7. 예산과목

- 재정사업 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선 3단계건설, 시설비및부대비, 감리비

- 원인자 부담금공사(8차 감리) : 세입 세출 외 현금(788,000천원)

붙임 : 1. 922공구 전면책임감리용역 발주계획 검토보고 1부.

2. 감리검토의견서 1부.

3. 설계변경내역서(총괄8회, 8차) 1부.

4. 합의각서(총괄8회, 8차) 1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	안태현		주무관	유원하		토목2과장	代문병종		도시철도토목부장	12/14 代윤방식
협조자	경리과장	최정수		기획예산과장	안순봉
시행	도시철도토목부-16378	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스 9층	/
전화		/전송	02)772-7306	/		/	부분공개(5)