투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 시행(2017년 포장도로 긴급복구공사 폐아스콘 운반 및 처리용역)-정산

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 “2017년 포장도로 긴급복구공사 폐아스콘 운반 및 처리용역”에 대한 설계변경(정산)을 아래와 같이 시행코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2017년 포장도로 긴급복구공사 폐아스콘 운반 및 처리용역

나. 용역기간 : 2017. 3.24 ~ 12. 15

다. 용역개요 : 폐아스콘 운반 및 처리 9,300톤

라. 도 급 자 : ㈜삼양이앤디 최성훈, ㈜드림아스콘 박광동, 서정윤

마. 변경사유 : 공사물량 감소에 따른 단순물량 감소

바.변경내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
도급비	공급가액	73,600,000	53,300,000	감)20,300,000
	부 가 세	7,360,000	5,330,000	감)2,030,000
	계	80,960,000	58,630,000	감)22,330,000

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로 및 도로시설물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설물 및 부대비, 시설비(57,882,000원)

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스이용제고, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비(748,000원)

붙 임   1. 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	천석기		도로보수과장	김권일		강서도로사업소장	12/14 김용제
협조자	관리단속과장	이희천
시행	도로보수과-13334	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2657-7941	/전송	02-2657-7960	/		/	대시민공개