문서번호	정수과-6941
결재일자	2017.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
임해기		서한호	12/14 이달영
협 조
	주무관			김동석

차수별 물량조정에 따른

『사업장폐기물(정수슬러지) 처리용역』 변경계약 계획

2017. 12.

구의아리수정수센터

( 정  수  과 )

차수별 물량조정에 따른

『사업장폐기물(정수슬러지) 처리용역』 변경계약 계획

『사업장폐기물 처리용역(단가계약)』과 관련, 차수별 물량 변동에 따른 변경계약을 하고자 합니다.

□ 용역계약 현황

○ 계 약 명 : 구의아리수정수센터 사업장폐기물(무기성 정수슬러지) 처리용역(장기계속단가계약)

○ 용역기간 : 2016. 06. 01 ~ 2018. 05. 31.

○ 계약상대 : 처리자[쌍용양회공업(주), 한일시멘트(주)]

운반자[욱성산업(주)]

○ 계약단가 : 43,150원/톤(처리 22,015원/톤, 운반 21,135원/톤)

○ 최초 계약내역

구 분	합계	2016년(1차) (6.1~12.31)	2017년(2차) (1.1~12.31)	2018년(3차) (1.1~5.31)	비고
처리물량	22,000톤	6,500톤	11,000톤	4,500톤
금 액(원)	949,300,000원	280,475,000원	474,650,000원	194,175,000원

○ 1차수 변경내역

구 분		당 초(원)	변 경(원)	증, 감	비 고
총계약부기금액(원)		949,300,000	949,211,880	감88,120	원단위 및 소수점이하 물량 절삭에 따른 금액변경
차수별	1차(2016)	280,475,000	216,136,530	감 64,338,470
	2차(2017)	474,650,000	538,900,350	증 64,250,350
	3차(2018)	194,175,000	194,175,000	0	변경 없음

□ 2차수 변경계약 사항

○ 2017년 사업장폐기물 처리현황

- 처리기간 : 2016. 12. 16 ~ 2017. 11. 30.

- 처리물량 : 7,383톤(2차수 계약물량 대비 5,106톤 감소)

- 처리금액 : 금318,510,350원(2차수 계약금액 대비 22,390,000원 감소)

○ 변경계약 내용

- 차수별 물량 조정 : 2차년도 잔여분 5,106톤을 3차년도로 이월

- 물량조정에 따른 차수별 금액조정

- 처리량의 소숫점이하 및 처리금액 원단위 절삭에 따른 총부기금액 변경

- 계약기간, 처리단가, 총물량은 변경 없음

○ 세부 변경내역

*******************

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**********

****************************************************************************************************************************************************************************************

□ 보고자 의견

○ ‘17년 회계연도 종료에 따른 계약 및 지출업무 마감으로 인하여 11월 처리물량에 대하여 청구에 의거, 12월 20일까지 정산 지급하고, 12월 처리물량은 ’18년도 1월분 처리비에 포함하여 정산·지급하고자 함.

○ 단, ‘17. 3월분 운반비 과지급분에 대하여 ’17.11월 지급분에서 공제하고 지급

※ 톤단위로 소숫점을 절삭하지 않은 지급액 15,630원 감액 지급 예정

○ 2차, 3차년도 처리물량 변동에 따라 설계변경하고, 행정지원과에 변경계약을 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1. 합의서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.