문서번호	토목부-26341
결재일자	2017.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	교량건설과장	토목부장
권순환	박용택	전결 12/14 김영수

건설폐기물처리용역 설계변경(전체3회, 6차3회) 시행

《천호대로(광나루역) 확장공사 건설폐기물처리용역》

2017. 12

도시기반시설본부

(토목부)

건설폐기물처리용역 설계변경(전체 3회, 6차 3회) 시행 보고

《천호대로(광나루역) 확장공사 건설폐기물처리용역》

‘천호대로(광나루역) 확장공사 건설폐기물처리용역’의 토목공사 추가에  따른 용역기간 연장 및 6차 용역비 변경 요청에 대하여 검토 보고드림

※ 관련근거: 수성 제2017-3471호(‘17.11.29) ‘건설폐기물처리용역 변경설계서 제출(전체 3회 및 6차 3회 변경)‘

1		용 역 개 요

○ 용역명 : 천호대로(광나루역) 확장공사 건설폐기물처리용역

○ 용역기간 :

- 전체 : ‘10.12.31 ~ ’17.12.31

- 6차 :  ‘16.01.14 ~ ’17.12.31

○ 규    모

- 운반 및 처리 : 41,349ton(폐콘 18,809, 폐아스콘 21,132, 혼폐 1,408)

○ 용 역 비 : 688,706천원  (6차: 100,000천원)

○ 용 역 사 : 정일산업㈜

○ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링

○ 용역비 현황

[단위 : 천원]

전 체 계약액	기 시행					금회 (6차)	비고
	1차	2차	3차	4차	5차
688,706	56,559	147,287	44,830	40,040	179,700	220,290

2		감리단 보고내용

□ 설계변경 사유

○ 토목공사(지하차도 상부 경관개선공사) 추가로 인한 건설폐기물 처리용역 계약기간 연장 및 6차 용역비 변경 필요

○ 용역비 및 용역기간 변경

(단위 : 천원)

구 분		용역비 및 용역기간			비고
		당 초	변 경	증·△감
용 역 비 (천원)	전체 3회	688,706	688,706	-
	6차 3회	100,000	220,290	120,290
용역기간 (일)	전체 3회	‘10.12.31 ∼ ‘17.12.31	‘10.12.31 ∼ ’18.06.30	증) 6개월
	6차 3회	‘16.01.14 ∼ ‘17.12.31	‘16.01.14 ∼ ‘18.06.30	증) 6개월

○ 설계변경 현황

- 폐기물 수량 증·감 대비표

[단위 : ton]

공 종	전 체			6 차			비고
	당 초	변 경	증·△감	당 초	변 경	증·△감
폐아스콘	21,132	21,132	-	3,881	9,773	5,892
폐콘크리트	18,809	18,809	-	1,187	3,132	1,945
혼합폐기물	1,408	1,408	-	546	546	-

- 용역비 증·감 대비표

[단위 : 천원]

공 종	전 체			6 차			비고
	당 초	변 경	증·△감	당 초	변 경	증·△감
1.폐기물 운반비	168,804	168,804	-	22,927	54,548	31,621
2.폐기물 처리비	457,292	457,292	-	67,982	145,716	77,734
공급가액	626,096	626,096	-	90,909	200,264	109,355
부가세	62,610	62,610	-	9,091	20,026	10,935
총용역비	688,706	688,706	-	100,000	220,290	120,290

○ 감리단 검토의견

- 토목공사의 사업기간 연장에 따른 계약기간 연장사항으로 계약상대자의 귀책사유가 없으므로 용역기간 및 6차 용역비 변경함이 타당함

3		조치계획

○ 감리단 보고내용과 같이 시설공사 설계변경에 따른 공사지연으로 폐기물처리용역 계약기간 연장이 필요하므로 설계변경 반영하여 사업추진에 차질이 없도록 조치코자 함

붙  임 : 1) 감리 검토 공문 1 부.

2) 설계서 및 합의각서 1부.  끝.