문서번호	토목부-26348
결재일자	2017.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	교량건설과장	토목부장
권순환	박용택	전결 12/14 김영수

건설폐기물처리용역 설계변경(전체 1회) 시행

《천호대로 연장 중앙버스전용차로 건설폐기물처리용역》

2017. 12

도시기반시설본부

(토목부)

건설폐기물처리용역 설계변경(전체 1회) 시행 보고

《천호대로 연장 중앙버스전용차로 건설폐기물처리용역》

‘천호대로 연장 중앙버스 전용차로 건설폐기물처리용역’의 토목공사 공사기간 연장에 따른 용역기간 연장 및 폐기물 운반비의 야간할증 정산으로 인한  용역비 변경 사항에 대하여 검토 보고드림

※ 관련근거: 수성 제2017-3470호(‘17.11.29) ‘중앙버스전용차로 건설폐기물처리용역 변경설계서 제출(전체 1회)‘

1		용 역 개 요

○ 용역명 : 천호대로 연장 중앙버스 전용차로 설치공사 건설폐기물처리용역

○ 용역기간 :

- 전체 : ‘17.11.07 ~ ’17.12.31

○ 규    모

- 운반 및 처리 : 7,518ton(폐콘 1,650, 폐아스콘 2,261, 평삭아스콘 3,607)

○ 용 역 비 : 211,840천원

○ 용 역 사 : ㈜상우이디아이 외 1

○ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링

2		감리단 보고내용

□ 설계변경 사유

○ 토목공사 공사기간 연장으로 인한 폐기물처리 용역기간 연장

○ 폐기물 운반비의 노무비 야간할증 금액을 실제 발생된 주간 및 야간수량으로 정산

○ 용역비 및 용역기간 변경 현황

(단위 : 천원)

구 분		용역비 및 용역기간			비고
		당 초	변 경	증·△감
용 역 비 (천원)	전체1회 변경	219,292	211,840	(△)7,452
용역기간 (일)	전체1회 변경	‘17.11.07∼‘17.12.31(55)	‘17.11.07∼‘18.04.30(175)	120

○ 설계변경 현황

- 폐기물 수량 증·감 대비표

공 종	단위	수량 증·감			비 고
		당 초	변 경	증·△감
■ 폐기물 운반
야간 운반	㎥	3,215	2,477	△738
주간 운반	㎥	-	738	738
■ 폐기물 처리
폐콘크리트	ton	1,650	1,650	-
폐아스콘	ton	2,261	2,261	-
평삭아스콘(유용)	ton	3,607	3,607	-

- 용역비 증·감 대비표

[단위 : 천원]

공 종	전 체			비 고
	당 초	변 경	증·△감
1.폐기물 운반비	107,702	102,105	△5,597
제경비(일반관리비+이윤)	22,619	21,442	△1,177
2.폐기물 처리비	69,035	69,035	-
공급가액	199,356	192,582	△6,774
부 가 세	19,936	19,258	△678
총용역비	219,292	211,840	△7,452

○ 감리단 검토의견

- 토목공사의 사업기간 연장에 따른 계약기간 연장사항으로 계약상대자의  귀책사유가 없으므로 용역기간 연장 및 폐기물 운반비의 노무비 야간할증 주․야간 수량정산으로 인한 용역비 변경함이 타당함

3		조치계획

○ 감리단 보고내용과 같이 시설공사 공기연장에 따른 폐기물처리 용역 계약기간 연장 및 폐기물 운반비의 노무비 야간할증 주․야간 수량정산이 필요하므로 설계변경 반영하여 사업추진에 차질이  없도록 조치코자 함

붙  임 : 1) 감리 검토 공문 1 부.

2) 설계서 및 합의각서 1부.  끝.