투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행[2017년 노후포장도로 정비공사(강서1구역)폐아스콘 운반 및 처리용역]

우리 사업소에서 시행중인 『2017년 노후포장도로 정비공사(강서1구역)폐아스콘 운반 및 처리용역』을 아래와 같이 설계변경(정산) 시행하고자 합니다.

1. 용 역 명 : 2017년 노후포장도로 정비공사(강서1구역)폐아스콘 운반 및 처리용역

2. 용역기간 : 2017. 6. 5. ~ 2017. 12. 15.

3. 용역개요 : 폐아스콘 운반 및 처리 12,548톤

4. 도 급 자 : ㈜삼양이엔디 대표 최훈성, ㈜드림아스콘 대표 서정윤

5. 변경사유 : 당초 계약물량 대비 실 작업물량 반영

6. 변경내역

구 분		금 액(원)		비 고(증·감)
		당 초	변 경
총 용 역 비		108,801,000	147,500,000	증) 38,699,000
용역비	공 급 가 액	98,910,000	134,090,910	증) 35,180,910
	부가가치세	9,891,000	13,409,090	증) 3,518,090
	계	108,801,000	147,500,000	증) 38,699,000

7. 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물 관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	정회곤		도로보수과장	김권일		강서도로사업소장	12/14 김용제
협조자	관리단속과장	이희천
시행	도로보수과-13320	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/
전화	02-2657-7941	/전송	02-2657-7960	/	jhgon1999@seoul.go.kr	/	부분공개(5)