문서번호	도시철도토목부-16347
결재일자	2017.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
김근수		최진규	12/14 代윤방식
협 조
	주무관			최경호
	주무관			조태현

『9호선 3단계 궤도공사(1,2공구)』

설계변경 검토보고

2017. 12.

도시기반시설본부

(도시철도 토목부)

『 9호선 3단계 궤도공사(1,2공구)』

설계변경 검토보고(총차 및 2차 2회)

9호선 3단계 궤도공사(1,2공구) 추진 중 건설사업관리 책임기술자로부터 설계변경(수량변경 증·감)에 따른 계약변경 실정 보고가 있어 다음과 같이 검토 보고드림

1		관련근거

○ 도화(궤도) 2017-219(‘17.12.12.) 설계변경 실정보고

○ 동명궤감 2017-5135(’17.12.06.) 설계변경 실정보고

2		공사개요

○ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1,2공구)

○ 위    치 : 서울특별시 송파구 잠실동 ~ 송파구 방이동

○ 규    모 : 궤도부설(콘크리트도상) 19.56km

분기기부설(RC 침목) 23틀

○ 공사기간 : 2016.06.13. ~ 2017.12.25.

○ 공사금액

-1공구 : 10,661백만원(도급비:6,839백만원, 관급비:4,145백만원)

-2공구 : 11,153백만원(도급비:6,839백만원, 관급비:4,338백만원)

3		보 고 내 용

□ 계약현황

○ 궤도1공구                                                (단위:천원)

구 분	총 체	1차(기준공)	2차(금회)
도 급 비 (비율)	6,664,688 (100%)	500,000 (7.5%)	6,164,688 (92.5%)
공사기간	‘16.09.26 ~‘17.12.25	‘16.09.26 ~‘16.12.30	‘16.12.31 ~‘17.12.25

○ 궤도2공구                                                         (단위:천원)

구 분	총 체	1차(기준공)	2차(금회)
도 급 비	6,955,165	2,100,000	4,855,165
(비율)	(100%)	(30.2%)	(69.8%)
공사기간	‘16.06.13 ~‘17.12.22	‘16.06.13 ~‘16.12.30	‘16.12.31 ~‘17.12.22

□ 설계변경 현황

○ 궤도1공구

◊ 변경현황                                                           (단위:천원)

구 분		총 체	1차(기준공)	2차2회(금회)
도 급 비	당초	6,664,688	500,000	6,164,688
	변경	6,152,896	500,000	5,652,896
	증감	감511,792	변경없음	감511,792
공사기간	당초	2016.09.26 ~2017.12.25	2016.09.26 ~2016.12.30	2016.12.31 ~2017.12.25
	변경	변경없음	변경없음	변경없음

◊ 변경 내용                                                            (단위:천원)

연번	설계변경 내용	당초	변경	증 감
합 계		3,816,317	3,304,525	▼511,792
1	○ 방진매트 설치구간 변경 - 방진구간 연장(상본선) 증가 및 완충구간 방진매트 설치비 오류 반영	297,166	318,779	▲21,613
2	○ 횡단사각배수로 스틸그레이팅 TYPE 변경 - 횡단배수로 스틸그레이팅 U형 TYPE으로 설계되어 콘크리트 도상 파손우려되어 스틸그레이팅 날개형 TYPE으로 변경	14,841	13,992	▼849
3	○ 시점부 물량변경 - 설계도면상 궤도부설시점이 32km365로 반영되어 있으나, 궤도부설이 32km380으로 공사 시점 변경으로 물량 감소	33,670	21,185	▼12,485
4	○ 본선구간 궤도자재 수량 - 본선 및 측선구간에 일반궤도구간과 분기구간 자재 수량이 중복 적용되어 분기기 자재 수량 감소	1,974,790	1,767,674	▼207,116
5	○ 부유궤도구간 고장력철근 추가물량 - 진동영향 구간 내 방진구간 연장(상본선) 증가로 인한 고장력철근 추가물량 반영	-	2,290	▲2,290
6	○ EGI안전휀스 수량 변경 - 노반공구 작업장내에서 시공함으로 인해 EGI안전휀스 감소	236,579	-	▼236,579
7	○ 도유기 수량 변경 - 도유기 수량오류에 따른(4조→2조)로 설계 궤도자재 수량을 증량	30,759	15,380	▼15,379
8	○ 철관장치 자재누락 및 무도유상판 교체 - 2단계구간 분기기(60kg, 4틀) 철관장치에 대한 자재 수량 누락 및 무도유상판 교체	-	61,746	▲61,746
9	○ 건축한계틀 운영 - 궤도분야 및 타분야 공종이 마무리되감에 따라, 각 분야별 합동검측을 위한 건축한계틀 수리 및 모타카 운영	-	14,444	▲14,444
10	○ 용접수량 변경 - 레일용접계획 시공상세도 작성 및 시점부 레일교환변경에 따라 용접수량이 설계수량과 달라 적정수량 반영 - 가스압접 증가 2개소, 테르밋트 증가 4개소	204,798	206,637	▲1,839
11	○ 제표설치 수량변경 - 제표설치 수량의 변경사항을 확인 반영 - 서울메트로9호선운영 합동회의 결과 반영	51,506	53,904	▲2,398
12	○ 시공상세도 수량변경 - 시공상새도 작성분 반영 - 시공상세도 감소 169매	54,691	30,174	▼24,517
13	○ 제경비정산 및 타설물량정산 - 산업안전보건관리비 및 각종보험료 실비정산	917,517	798,320	▼119,197

○궤도2공구

◊ 변경 현황                                                       (단위: 천원)

구 분		총 체	1차(기준공)	2차2회
도 급 비	당초	6,955,165	2,100,000	4,855,165
	변경	6,513,913	2,100,000	4,413,913
	증감	감 441,252	변경없음	감 441,252
공사기간	당초	2016.06.13 ~2017.12.22	2016.06.13 ~2016.12.30	2016.12.31 ~2017.12.22
	변경	변경없음	변경없음	변경없음

◊ 변경 내용                                                        (단위:천원)

연번	설계변경 내용	도급비(천원)
		당초	변경	증 감
합 계		2,694,553	2,253,301	(감) 441,252
1	○ 개착BOX구간 배수계획변경 종점부 개착BOX구간 배수로 콘크리트 도상 배수계획 변경 도상배수로 설치 증가 3.3km 도상분리방지용 줄눈채움 감소 3.3km	152,388	87,727	(감) 64,661
2	○ 분기기구간 궤도자재 중복 수량(감)변경 당초설계 사급자재(침목) 분기기구간 중복 설계로 물량 정산 궤도자재 RC침목등 감소 1,756개	1,457,364	1,298,372	(감) 158,992
3	○ EGI휀스 설치철거 미시행 EGI휀스 공동사용으로 당초 반영된 EGI휀스설치 철거물량 감량 시행 EGI휀스설치철거 감소 1,710m	154,836	-	(감) 154,836
4	○ 전자감응식 도유기 수량변경 설계도면(궤도부설도)과 설계내역 수량과 불일치하여 실시공 물량 반영 도유기수량 증가 1조	23,235	30,980	(증) 7,745
5	○ 레일용접 수량변경 레일 용접수량이 설계수량과 불일치 하여 실 시공 물량 반영 가스압접증가 12개소, 테르미트용접 감소 18개소	302,074	293,937	(감) 8,137
6	○ 제표설치 수량변경 - 제표 설치수량 운영기관 협의결과 반영 - 기관사 혼동방지, 기존선과의 규격 통일, 설치개소, 수량조정	52,070	53,190	(증) 1,120
7	○ 시공상세도 수량변경 시공사 시공상세도 작성분 반영 시공상세도 감소 183매	86,286	46,311	(감) 39,975
8	○ 레일연마 연장변경 및 제경비 정산 레일연마 연장 감소 0.069km 물가변동 조정금액정산 산업안전보건관리비 및 각종보험료 실비정산	466,300	442,784	(감) 23,526

4		건설사업관리단 검토의견

○ 검토내용(1,2공구)

- 총차(2회) 및 2차공사(2회) 설계변경은 실정보고 내역 및 현장 실시공에 따른 물량정산, 물가변동 조정금액 정산, 각종 보험료, 산업안전보건관리비 및 환경보전비 실비정산 등 공사계약일반조건, 특수조건에 의거한 변경사항으로 상기와 같이 설계변경 후 준공처리함이 타당하다고 판단 됨

5		조 치 계 획

○ 상기 검토 내용의 9호선 3단계 궤도공사(1,2공구) 설계변경을 건설사업관리책임기술자 검토의견과 같이 시행하여 변경계약을 시행코자 하며,

○ 총차 및 2차공사 설계변경 내역을 계약부서(건설총괄부)에 통보하여 변경계약을 시행하고자  함.

붙임 : 설계변경에 따른 계약변경 요청문서 각1부(1,2공구).  끝.