문서번호	도시철도토목부-16325
결재일자	2017.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		토목2과장	도시철도토목부장
유원하		방영복	12/14 代윤방식
협 조
	건축공사과장			김내환
	시설전기과장			서태창
	설비공사과장			황영일
	주무관			안태현

「지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사」

전면책임감리용역 발주계획 검토보고(8차)

2017.  12.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사」

전면책임감리용역 발주계획 검토보고(8차)

우리 본부에서『지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사』시행 중 937정거장 #1출입구 등 설치를 위하여 둔촌주공 주택재건축조합과 협약체결한 원인자부담금 용역 발주계획(8차) 검토보고임.

※ ㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소 지감922-17-514호(‘17.11.15.)

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 서울지하철9호선3단계 922공구 건설공사 전면책임감리용역

□ 계 약 자 : ㈜선진엔지니어링 대표이사 김동수 외 2개사

□ 계약금액 : 총괄 4,400,762천원 (7차 614,700천원)

□ 용역기간 : 총괄 2010.08.05 ~ 2018.12.31

(7차 2017.05.08 ~ 2017.12.31)

□ 계약 및 집행현황

(단위 : 천원)

구 분	총 괄	기 집행(1~6차)	7차(진행 중)	장래
계약금액	4,400,762	3,284,673	614,700	501,389
용역기간	‘10.08.05~‘18.12.31	‘10.08.05~‘17.05.07	‘17.05.08~‘17.12.31

Ⅱ		발주계획(8차)

□ 발주방법

○ 8차 용역발주 및 계약은 원인자부담금으로 별도 시행

※ 용역총괄(8회)에 원인자 부담금공사 포함 계약금액 변경시행

□ 예산관리

○ 8차 용역은 둔촌주공주택재건축조합과 협약 체결하여 확보된 원인자 부담금으로 재정사업과 구분 세입세출 외 현금으로 관리

※ 재정사업은 기 시행중인 지하철 예산과목 적용

- 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 계약금액 변경(총괄8회)

○ 계약금액 조정

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
계약금액	4,400,762	5,188,762	증)788,000	원인자 부담금공사 용역 포함
용역기간	‘10.08.05 ~ ‘18.12.31	변경없음

○ 변경사유 : 우리시와 둔촌주공 주택재건축조합과 협약으로 확보된 원인자 부담금으로 기 계약 시행중인『서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사 전면책임감리용역』에 포함시행

□ 8차 용역발주(원인자 부담금공사)

○ 용역개요

- 용역기간 : ‘17.08.01 ~’18.12.31

- 계약금액 : 788,000천원

- 투입인원 : 50.00인·월

- 감리원 투입계획

등 급			감리원 투입계획	비고
상주감리원	토 목	고급	‘17.08.01~‘18.12.31
		중급
	건 축	고급	‘18.09.01~‘18.11.21
	기 계	고급	‘18.03.28~‘18.12.31
	전 기	고급	‘18.09.01~‘18.09.24
비상주 감리원			‘17.08.01~‘18.12.31

Ⅲ		조치의견

□ 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사 추진에 맞추어 아래와 같이 전면책임감리용역 총괄(8회) 변경 및 8차를 발주하고자 함.

○ 총괄(8회) 계약금액 변경

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
계약금액	4,400,762	5,188,762	증)788,000	원인자 부담금공사 용역 포함
용역기간	‘10.08.05 ~ ‘18.12.31	변경없음

○ 8차 용역발주

(단위 : 천원)

구 분	계약금액	용역기간	비 고
8차	788,000	착수일~‘18.12.31

붙 임 : 1. 감리사 설계변경(총괄8회) 및 용역발주(8차) 실정보고 1부.

2. 변경 설계서(총괄8회) 1부.

3. 설계서(8차) 1부.  끝.