문서번호	급수운영과-22853
결재일자	2017.12.15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
고원석		12/15 박희철
협 조

설계변경(2차) 심의위원회 의견서

『2017년 청담동외 6개동 상수도공사』

2017. 12.

강남수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의 의견서(2차)

심의 의원회 의견

○  공 사 명  :  2017년 청담동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 심의일시 : 2017. 12.15(금) 10:30

○ 심의장소 : 강남수도사업소 4층(급수운영과)

○ 심의의견 : 설계변경(2차) 심의 의견을 아래와 같이 제시함

구 분	직 위	심의내용 및 결과		성 명	비고
		심의항목	심의결과
위원장	급수운영과장	물량변동 적정성	적정함	박희철
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	시설관리과 시설6급	물량변동 적정성	타당함	윤복철
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	급수운영과 시설6급	물량변동 적정성	적정함	이승우
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	시설관리 시설6급	물량변동 적정성	적정함	김진성
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	급수운영과 시설7급	물량변동 적정성	적정함	제영도
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성

신청부서명	급수운영과
작 성 자	고원석
제출년월일	2017. 12. 15.

설계변경(2차) 요약 보고

「2017년 청담동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)」에 대하여 신규공정 및 물량변경 사항이 발생하여 아래와 같이 심의내용 보고

□ 공 사 명 : 2017년 청담동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

❍ 공사개요 : D=13~300mm, L=1,742m

❍ 계약기간 : 2017.07.05. ~ 2018.06.30.

❍ 도 급 비 : *************

❍ 도 급 자 : ************

□ 변경사유

❍ 시공물량 증ㆍ감에 따른 계약물량 조정

- 물량증가 : 콘크리트포장절단(100~150mm 적용) 공정 외 140개 공정

- 물량감소 : 아스팔트포장절단(100~150mm 적용) 공정 외 282개 공정

❍ 신규공정에 따른 계약물량 조정

- 신규공정 : 부단수활정자관부설및접합공(500mm) 외 4개 공정

□ 설계변경 내역                                       (단위 : 원)

구 분		총 부기금액	1차수 금액(17년)	2차수 금액(18년)	비고
계약 금액	당초	***********	***********	***********
	변경	***********	***********	***********
	증감	****	************	************

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.