문서번호	시설보수과-9129
결재일자	2017.12.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
한상신		12/15 김환겸
협 조

「2017년 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가)」 준 공 검 사 보 고

2017. 12.

동부도로사업소

(시 설 보 수 과)

『2017년 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

준 공 검 사  보 고

「2017년 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가)」와 관련하여  준공서류(2차 기성)가 제출되어 아래와 같이 준공검사를 시행하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 쌍합특수양회공사(주) 동부 2017-12-08(2017. 12. 14.)호

- 2017년 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가) 관련 준공계 제출

○ 관리단속과-14513(2017.12.14.) : 검사원지정요구서

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2017년 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가)

○ 계약업체 : ㈜쌍합특수양회공사 대표 안석태

○ 계약금액 : 1,893,980,000원

○ 계약기간 : 2017. 3. 6. ~ 2017. 12. 31.

○ 공사내용

- 아스콘포장 A = 70a

- 교면방수 A = 2,137㎡

- 콘크리트 표면보수 A = 2,412㎡

- 콘크리트 단면보수 A = 898㎡

□ 준공검사(2차기성) 개요

○ 2차기성 준공검사 대상 : 12~21차 작업지시 중 완료 물량

○ 2차기성 준공금액 : 금사억삼천삼백칠만원정(금433,070,000원)

○ 2차 기성 작업지시 및 공정 현황

구 분	주요작업내용	작업 물량	공정률	비 고
12차	장지2교 후타재 보수	- 후타재 보수 50m	100%
13차	천호지하차도, 성내유수지교 소파보수	소파보수 321㎡	100%
14차	탄천교 단면보수, 매봉터널 안내판설 치	단면보수 24㎡ 안내판 5개소	100%
15차	광평교 홍보판 설치, 송파지하차도 그레이팅 정비	홍보판 2개소 그레이팅 9개소	100%
16차	세곡3교 신축이음 정비	신음축이음 72.4m	100%
17차	대곡교 보도포장 및 연석보수	보도포장 7.4a	100%
18차	대치교 단면보수	단면보수 66㎡	100%
19차	영동3교 단면보수, 배수관 설치	- 단면보수 131㎡ - 배수관 설치 112m	100%
20차	헌릉교 단면보수	단면보수 220㎡	100%
21차	성내교 차선도색 등	차선도색 1,313㎡	100%

○ 준공검사 내용

검사 내용	검사 결과	비 고
•교면방수 표준 규격 일치 여부	이상없음
•작업지시 및 완료 물량 일치 여부	이상없음
•아스팔트 포장 표준 규격 일치 여부	이상없음
•공사시방서 및 설치기준 적합 시공 여부	이상없음
•교통 및 안전시설 설치기준 적합 여부	이상없음
•도색 물량 일치 여부	이상없음

○ 준공금액

(단위 : 원)

구 분		계약금액	전회 기성금액	금회 기성금액	누계금액	계약잔액	비고
총공사비		1,893,980,000	1,460,910,000	433,070,000	1,893,980,000	-
도급비	공급 가액	1,721,800,000	1,328,100,000	393,700,000	1,721,800,000	-
	부가 가치세	172,180,000	132,810,000	39,370,000	172,180,000	-
	계	1,893,980,000	1,460,910,000	433,070,000	1,893,980,000	-

□ 행정사항

○ 준공검사 결과 공사시방서 및 설치기준에 적합하게 시공 완료됨에 따라  준공처리하고자 함.

붙 임  1. 준공내역서 1부.

2. 준공검사 사진대지 1부.  끝.