문서번호	진료부-16064
결재일자	2017.12.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
★주무관	영상의학팀장	영상의학과장	진료부장		서북병원장
조진용	주무학	전혜상	代송은향		12/15 代박영숙A
협 조	간호부장			박영숙A
	약제부장			代이은주
	원무과장			정태명
	서무팀장			박준영
	시설팀장			조선행
	원무팀장			최낙준
	진료기획팀장			김상호

전산화단층촬영장치(CT) 구매 계획

2017. 12.

서울특별시 서북병원

(진료부 / 영상의학과)

전산화단층촬영장치(CT) 구매 계획

내구연한이 지나 진단의 정확성이 떨어져 최신장비로 교체하여 공공의료가 필요한 시민에게 질높은 최상의 의료서비스를 제공함으로써 지역거점 공공보건의료기관의 이미지를 제고하고 병원의 경쟁력을 높이고자 함.

현 황

Ⅰ

장비현황  및 문제점

장비명	형식명 (모델명)	제조국 (제조사)	구입연도	내구연한	비고
전산화단층촬영장치 (CT)	WCT-345-130 (Somatom motion6)	독일 (SIEMENS)	2004.03	10년

현재 사용하고 있는 CT장비는 2004년 구매한 6 Slice 방식의 장비로 최근 의료장      비(128 Slice) 등에 비해 검사 시간 증가로 방사선 피폭선량이 증가.

현재 연간 유지 보수비용이 5,400만원소요 되고 있으며, 또한 잦은고장과 튜브 수

명이 초과되어 장비의 원할한 운영에 차질이 있음.

「2017.6.12. IRS 고장으로 교체 수리」

특히 조영제를 사용하는 환자의 경우 조영제 투여 후 장비가 고장으로 멈추어 약

물 투여중에 검사를 못하는 경우가 발생하는 등 환자에게 불편 초래.

「2017.10.12. 검사도중 Scan 에러 발생하여 검사중단 발생」진료부-12742(2017.10.13)

따라서 진단의 정확성이 떨어지는 노후장비를 최신 의료장비로 교체하여 시민들에

게 질높은 의료서비스를 제공하고자 함.

문제점

환자에 대한 방사선 피폭선량 증가

장비 노후화에 따른 의료영상 질 저하

장비 내구연한 초과로 잦은 고장 발생

Ⅱ

세부추진계획

구매계획

구매장비 : 전산화단층촬영장치(Computed Tomography)

구매방법 : 일반경쟁입찰 (서울의료원 계약심시팀 통합구매)

**************************

설치장소 : 본관 영상의학과 CT 촬영실

추진일정

1) 장비업체 제안 설명회 개최

일  시 : 2018. 1월 10일 (수) 14:00~16:00

장  소 : 3층 중회의실

발표자 : 컴퓨터단층촬영장치 장비업체 2개사 내외

참석위원 : 병원장, 진료부장, 간호부장, 약제부장, 원무과장, 영상의학과 과장

2) 의료장비심의위원회 개최

일  시 : 2018. 1월 중 (자세한 일정은 추후 협의)

장  소 : 3층 중회의실

심의사항

ㆍ 전산화단층촬영장치 구매 필요성 검토

ㆍ 구매대상장비 사양의 적정성 검토

ㆍ 수입(특정) 제품 선정 심의

심의위원회 구성 (위원장 포함 6명)

ㆍ 위원장(1명) : 병원장

ㆍ 당연직 위원(4명) : 진료부장, 간호부장, 약제부장, 원무과장

ㆍ 위촉직 위원(1명) : 영상의학과장

ㆍ 간사 및 서기 등 : 진료기획팀장, 진료기획 팀원, CT전문관, 영상의학과 서무

3) 의료장비 통합구매 의뢰

구매서류 제출 : 2018. 2월 초 (서울의료원 계약심사팀)

제출서류

ㆍ 의료장비 통합구매요구서

ㆍ 비교규격서 및 공고규격서(영문 및 국문)

ㆍ 1차 산출기초조사서 (납품실적 증빙서류 포함)

ㆍ 의료장비 심의의결서

ㆍ 의료장비 품목선정(규격)ㆍ예산 심의서

ㆍ 수입ㆍ특정제품선정심의서

ㆍ 견적서 및 카달로그

4) 통합구매 업무절차

발주기관	구매요구→	서울의료원	서울시	서울의료원	결과통보→	발주기관
예산심의.규격검토 시장조사.규격심의		자료취합→규격검토→사전규격공고(G2B)→ 2차시장조사	계약심사	입찰(G2B)낙찰자결정		계약체결

5) 장비 구매 계약 체결

구매방법 : 일반경쟁입찰(규격․가격 분리 또는 동시입찰) -서울의료원 계약심사팀

**************************

세부 추진일정

일 정	내 용	비 고
12월	구매계획서 작성
	1차 시장조사 및 공통 규격서 작성
1월	장비설명회 및 의료장비심의개최	장비설명회(1.10)
2월	의료장비 통합구매 의뢰 (서울의료원)	서울의료원 계약심사팀
3월	사전규격 공고 및 2차 시장조사 (서울의료원)	사전규격공고(G2B)
	규격 심의 (서울의료원)
4월	계약심사 (서울시청 계약심사과)	산출가격 적정 등 확인
5월	입찰(G2B) 및 낙찰자 결정 (서울의료원)
6월	계약체결 및 납품	납품 90일 소요
9월	장비 설치 및 내부 시설공사	설치 세부계획 작성
10월 이후	검수 및 정상가동

※ 상황에 따라 일정이 변경 될 수 있음

Ⅲ

행 정 사 항

장비설명회 개최 (2018. 1. 10. 14:00 )

ㆍ 참석위원 (병원장, 진료부장, 간호부장, 약제부장, 원무과장, 영상의학과장)

의료장비심의개최 (2018.1월 중)

ㆍ 평가위원 (병원장, 진료부장, 간호부장, 약제부장, 원무과장, 영상의학과장)

서울의료원 통합구매 최종낙찰 후 계약체결 협조 (원무과 서무팀)

ㆍ 전기 및 시설공사 협조 (원무과 시설팀)

ㆍ EMR 연동 등 전산관련 협조 (원무과 전산실)

장비 연동을 위한 협조 (PACS 업체)

기존장비는 불용품의 소요조회 후 매각 또는 폐기 예정

(서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 제71조, 제72조)

Ⅳ

기 대 효 과

최신 디지털 의료 환경 도입으로 병원 이미지 제고

신속 ㆍ정확한 의료영상 서비스 개선으로 시민 고객만족도 향상