문서번호	토목부-26499
결재일자	2017.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교량건설과장	토목부장
노순재		박용택	12/15 김영수
협조
	주무관		김동현

설계도서(녹천~도봉지하차도 지하화 연장) 검토 실정보고

(동부간선도로 확장공사-2공구)

2017. 12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

설계도서(녹천~도봉지하차도 지하화 연장) 검토 실정보고

- 동부간선도로 확장 공사(2공구) -

녹천~도봉 지하차도 지하화 연장 설계도서 검토시 일부 수정사항이 발생하여 관련 사항을 보고드림

※ 관련근거 : 동부2감 제17-204호(‘17. 11. 10.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 동부간선도로 확장공사(2공구)

○ 공사규모 : 도로확장 폭 7~8차로, 연장 3,200m(지하차도 2,980m)

○ 도 급 비 : 279,329백만원(9차: 18,000백만원)

○ 공사기간 : ′08.12. ~ ′19.12.

○ 시 공 사 : ㈜한라

○ 감 리 사 : ㈜이산

Ⅱ		실정보고 사항

○ 녹천~도봉지하차도 지하화 연장 설계도서 검토결과 수정사항 발생

○ 위치도

○ 추진경위

- ‘16.1.~12: 도봉지하차도 지하화2차 보완 실시설계 실시

- ‘17.1~17.9 : 설계도서 검토 1~2차 (설계사 ⊲⊳ 감리단)

Ⅲ		감리단 검토내용

○ 지하화 연장 설계도서 검토시 중복반영, 내역 및 수량산출서 불일치

누락 부분이 발생하여 조정이 필요한 실정임

○ 설계도서 검토결과 주요조정 내역

구 분	설계도서 검토	금액(천원)	비고
배수공	∘BOX 2@3.0X3.5 암거 신축이음 누락	4,000	별첨#35-2, #36-1
구조물공	∘U-TYPE구간 상부 가로등 기초 레미콘, 철근 누락	600	별첨#47-1
구조물공	∘우각부 띠장연결 보강수량 누락	12,000	별첨#52-2
배수공	∘하수박스 수팽창지수제 수량 삭제	-3,000	별첨#35-2, #35-3외
배수공	∘하수박스 물돌리기 누락	1,000	별첨#55-4-1
배수공	∘오수관로 물돌리기 누락	400	별첨#55-4-2
소 계		15,000
구 분	계약내역서 검토	금액(천원)
옹벽공	∘기 시공 옹벽 차량용 방호책 당초수량 미 삭제 -도화→해당구간 설계 시 보도용 난간 반영	-340,000	중복반영
교통안전 시설공	∘미 시공 옹벽 가드레일 수량 중복 -도화→구조물공(옹벽공)설계 시 차량용 방호책 반영 -선진→교통안전시설공 설계 시 가드레일 반영	-65,000	원설계자의견 반영
옹벽공	∘시점부 진출로 U-YTPE 보도용 난간 변경 (내역서 : 차량용 방호책, 도면 : 보도용 난간)	-128,000	원설계자의견 반영
전체	∘수량산출서와 내역서간 수량 불일치 -내역서(2016.12.23) 계약반영 -수량산출서(2017.01.25) 검토완료(설계감리 지적반영)	-84,000	별첨 설계도서 검토현황
구조물공	∘STA.3+080∼3+125(L=45m) 내역 기입 시 누락	565,000	누락
비탈면 안정공	∘A-1구간 호안블럭 기 시공수량 일부 누락 반영 (600m 중 350m만 반영)	46,000	누락
소 계		-6,000
계		9,000

Ⅳ		조치계획

○ 지하화 연장보완 실시설계에 대한 설계도서 검토결과 중복반영, 불일치

누락부분에 대하여 감리단 검토의견에 따라 조정하여 내역에 반영코자 함.

붙  임 : 감리단 검토 의견서 및 세부검토 결과서 각 1부. 끝.