시  민

문서번호	시설관리과-26336
보존기간	년
결재일자	2017.12.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	시설관리과장
박상권	박미영	12/15 천성훈
협 조

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

【2017년 미아동외 4개동 상수도공사】

2017. 12.

북부수도사업소 시설관리과

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

『2017년 미아동외 4개동 상수도공사』시행중 신규공종 및 시공물량 증․감 사항이 발생됨에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의 완료하고 결과를 보고함

1. 일 반 현 황

가. 공 사 명 : 2017년 미아동 외 4개동 상수도공사

나. 공사개요 :

당초 : D=13∼300㎜, L=1,105m

변경 : D=13∼300㎜, L=1,377m

다. 공사기간 : 2017. 4. 12.~ 2017. 12. 10.(총부기기간 : 2017. 4. 12. ~ 2018.6.30.)

라. 도 급 비

(당초) 금 418,907,430원

(변경) 금 418,907,430원

총부기금액 변동없음

마. 도 급 자 : 서준산업개발㈜  대표 박영수

2. 설계변경 내역

구 분	당초(원)	변경(원)	증,감(원)	비 고
도 급 비	418,907,430	418,907,430	-
공급가액	380,824,937	380,824,937	-
부 가 세	38,082,493	38,082,493	-

○ 신공종 및 시공물량 증․감에 따른 변경

가. 신공종 발생

- 주철관철거공외 5개 공종

나. 공사 중 물량 증․감 사항 발생

3. 심 의 내 용

가. 수량변동 및 단가적용의 적정성 여부

나. 계약변동 (증․감)수량 단가 낙찰률 적용 적정여부

다. 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

※ 신규공종 및 계약물량 증․감에 대한 설계변경 사항으로 단가계약공사의 특성상 발생

4. 심의회 개최

가. 심의일정 : 2017년 12월 15일(금) 09:10

나. 심의장소 : 북부수도사업소 시설관리과

다. 심의위원 : 위원장(시설6급 박미영)

위원(시설7급 이한수, 시설7급 정성식, 시설7급 정성식, 시설6급 이문성)

5 심 의 결 과

가. 설계변경의 타당성 : 적정

나. 신규공종 발생유무 및 단가적용 타당성 : 적정

다. 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정

라. 계약변동(증․감)물량 계약단가 낙착율 적정 적용여부 : 적정

마. 각종 제반 규정 준수여부 : 준수

바. 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 적정

붙임 : 1. 설계변경사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 심의 결과서 1부.  끝.