투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	총무과장
(경유)
제목	기획전시실 전시환경 개선공사 변경계약 의뢰(건축, 전기공사)

1. 재무과-546600(2017.11.8.) 및 전시과-1907(2017.5.31.)호와 관련입니다.

2. 2017년~2018년 장기계속계약 사업으로 추진중인 기획전시실 전시환경 개선공사(건축공사·전기공사) 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 기획전시실 전시환경 개선공사 – 건축·전기공사

나. 공사기간 : 2017.11.6.~ 12.25(50일)

다. 변경금액

구분	당초(원)	변경(원)
건축공사	208,853,120	199,906,770
전기공사	67,759,640	64,521,700

붙임  1. 실정보고 및 설계변경 방침서 1부

2. 설계변경 내역서 각1부.  끝.

	전시과장
★주무관	나신균		전시과장	12/15 代류위남
협조자
시행	전시과-4185	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55 (신문로2가)	/	http://www.museum.seoul.kr/
전화	02-724-0150	/전송	02-724-0255	/	nsksk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)