투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	준공기한 연기 및 설계변경(총차3회, 2차2회)시행-사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역(장기계속)

1. 시설보수과-10849(2017.12.15.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 『사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역(장기계속)』에 대한 준공기한 연기 및 설계변경(총차3회, 2차2회)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역(장기계속)

나. 용역기간 : 2016. 4. 1 ~ 2017. 12. 25.

다. 계 약 자 : ㈜한국건설관리공사, ㈜대한콘설탄트

라. 준공기한 연기

- 당초 : (총차) 2016.4.1. ~ 2017.12.25.

(2차) 2017.3.1. ~ 2017.12.25.

- 변경 : (총차) 2016.4.1. ~ 2018.5.30.

(2차) 2017.3.1. ~ 2018.5.30.

마. 준공기한 연기사유 : 당해 공사의 준공기한 연장에 따른 원활한 사업관리 추진을 위한 건설사업관리용역 준공기한 연장 시행

바. 지체상금 부과여부 : 발주처 귀책사유로 인한 지체상금 미부과

사. 설계변경 시행

구 분	당 초	변 경	증·감
총 차	672,424,000	807,424,000	증) 135,000,000
2 차	305,689,000	440,689,000	증) 135,000,000

아. 설계변경 사유 : 준공기한 연장에 따른 기술자 투입기간 추가(5개월) 인건비 증액

‣ 책임기술자 1인, 분야별기술자 1인, 기술지원기술자 6인 직접인건비 ▲51,416천원

‣ 용역 제경비 및 기술료 ▲77,776천원

‣ 직접경비(주재비, 보고서작성비) ▲5,808천원

자. 예산과목

- 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리(도시개발특별회계), 사천교 성능개선, 시설비 및 부대비, 감리비(▲135,000,000) - 기 재배정된 감리비 집행잔액 예산 사용임

붙임 : 1. 감리용역 준공기한 연기 및 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경(총차3회, 2차2회) 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

주무관							이동섭				주무관					김종성					시설보수과장					신동헌					서부도로사업소장						12/15 배광환
협조자				주무관							윤미란					관리단속과장							안근
시행			시설보수과-10866										(						)		접수												(						)
우	03918					마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과																/
전화		02-300-8374							/전송			02-300-8384					/	lds0420@seoul.go.kr													/	부분공개(5)