문서번호	시설보수과-10849
결재일자	2017.12.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
이동섭		신동헌	12/15 배광환
협조
	주무관		김종성

사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역

준공기한 연기 및 설계변경 검토보고

2017. 12

서부도로사업소

(시설보수과)

사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역

준공기한 연기 및 설계변경 검토보고

우리 사업소에서 시행중인 ‘사천교 확장 및 성능개선공사’ 의 준공기한이 연기됨에 따라 원활한 사업관리를 위한 건설사업관리용역 준공기한 연장 및 기술자 투입일수 조정에 따른 설계변경 검토 보고임.

Ⅰ	관련근거

○ 시설보수과-9984(‘17.11.17), 사천교 바닥판 손상에 따른 조치방안 검토보고

○ 관리단속과-15753(‘17.11.21), 공사 변경계약 체결(준공연장)

○ 시설보수과-10535(‘17.12.6), 감리용역 부족예산 조치계획 보고

Ⅱ	용역개요

○ 용 역 명 : 사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역(장기계속)

○ 계약금액 : 672,424천원 (2차:305,689천원)

○ 용역기간 : 2016.4.1.~2017.12. 25(2차:‘17.3.1~‘17.12.25)

○ 용 역 사 :  ㈜한국건설관리공사(60%), ㈜대한콘설탄트(40%)

○ 주요 추진경위

- ‘16. 4. 1 : 감리용역(총차,1차) 계약 및 착수

- ‘17. 2.28 : 용역 1차분 준공 및 2차분 계약

- ‘17.11.17 : 사업관리 중 기존교량 바닥판 손상에 대한 조치방안 검토

- ‘17.11.21 : 공사 준공기한 연기(2018.5.30.까지)

- ‘17.12. 6 : 감리원 연장투입에 따른 용역비 예산조정(편성목 변경) 요청

- ‘17.12.14 : 예산조정(시설비→감리비) 재배정(108백만원)

Ⅲ	준공기한 연기 검토

○ 연기사유 : 당해 공사의 준공기한이 2018.5.30.까지로 연장됨에 따라 원활한 사업관리를 위하여 건설사업관리용역의 준공기한 연기가 불가피함.

○ 준공기한 연기

- 당초 : (총차) 2016.4.1.~2017.12.25.

(2차) 2017.3.1.~2017.12.25.

- 변경 : (총차) 2016.4.1.~2018.5.30.

(2차) 2017.3.1.~2018.5.30.

○ 책임소재 : 발주처 귀책사유

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ	설계변경 검토

□ 변경사유

○ 준공기한 연장에 따른 기술자 투입기간 추가 반영 (5개월)

- 책임기술자(고급) 5개월, 분야별기술자(초급) 5개월

○ 추가 용역 기간은 당해 공사의 준공처리 등 마무리 시기이며, 예산범위 내에서 용역을 수행해야 함을 감안하여 연장기간 중 행정지원인력은 철수하고 감리원 2인으로 운영

□ 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증·감
총 차	672,424,000	807,424,000	증)135,000,000
2 차	305,689,000	440,689,000	증)135,000,000

□ 예산현황(감리비, 2017.12월 현재)

(단위:천원)

구 분	예산현액	집 행 액 (원인행위액)	가용예산	비 고
계	808,000	672,424	135,576
확장공사(이월)	300,000	300,000	-	1차계약 준공
성능개선공사	508,000	372,424	135,576	집행잔액

□ 검토의견

○ 상기 보고내용과 같이 당해 공사의 준공기한 연기에 따른 원활한 사업관리 추진을 위하여 건설사업관리용역 준공기한 연장은 타당하며,

○ 그에 따른 추가 투입기간에 대한 기술자 인건비 반영은 적정하므로 감리비 가용예산을 활용하여 설계변경 계약 추진코자 함.

- 예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 사천교 성능개선, 감리비

○ 또한, 금년도까지 용역 기성부분은 준공 처리하고 추가 용역비(135백만원)은 사고이월 조치코자 함.

Ⅴ	향후계획

○ 2017. 12월 : 설계변경(총차3회, 2차2회) 계약

○ 2018.  5월 : 용역 준공

붙임 : 1. 감리용역 부족예산 조치계획 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차2회, 2차1회) 1부.  끝.