기성부분검사(감독) 조서(갑)[919공구 감리용역(8차 2회)]

문서번호	도시철도토목부-16412
수 신 자	건설총괄부장
접수번호

결재	주무관			궤도과장			도시철도토목부장
		조태현			최진규			12/15 代호경수
협조

공사명	서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사 전면책임감리용역(8차 2회)
계약자	㈜수성엔지니어링 대표 박 미 례
계약금액	금이십이억사천사백이십이만팔천원(금2,244,228,000원)								기성 부 분 준공금액			금육억일천일백사십오만일천삼백오십원(금611,451,350원)
계약일자	2016년 12 월 30 일								착공일자			2017년 01 월 01 일
준공기한	2018년 12 월 31 일
기성검사일자	2017년 12 월 15 일
참고사항	- 전회까지 기성금액 : 금630,337,000원 - 금 회 기성금액 : 금611,451,350원 - 누 계 기성금액 : 금1,241,788,350원(기성율 55.33%), 금회 기성기간(17.07.01.~17.12.14.)
위 용역에 대한 감독 및 기성검사를 마쳤는 바, 용역 설계서와 과업지시서 및 기타 계약조건의 내용과 같이 완료되었기에 본 조서를 제출함.
2017년 12월 15일
현장감독공무원			도철토목부	직	6 급	성명	정중규	정중규			도철건축부		직	6급	성명	정재흥	정재흥
			도철설비부	직	6 급	성명	박철호	박철호
			도철설비부	직	8 급	성명	신용준	신용준
검 사 자			도철토목부	직	6 급	성명	김근수	김근수			도철토목부		직	6 급	성명 조규양		조규양
서울특별시도시기반시설본부(분임)경리관 귀하

기성검사 내역서(8차 2회)

1. 용 역 명 : 서울 지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사 전면책임감리용역(8차)

2. 계 약 자 : ㈜수성엔지니어링 대표 박미례

3. 계약금액 : 금이십이억사천사백이십이만팔천원(금2,244,228,000원)

4. 기성금액

○ 전회까지 기성 : 금630,337,000원

○ 금 회 기 성   : 금611,451,350원 (기성기간 : 2017.07.01. ~ 2017.12.14.)

○ 누 계 기 성   : 금1,241,788,350원

5. 내 역 서

(단위 : 원)

공 종	수량	단위	계약금액	기성금액			비고
				전회	금회	누계
1.전면책임감리	1	식	2,040,207,273	573,033,636	555,864,864	1,128,898,500
2.손해배상 공제료			-	-	-	-
3.부가가치세	10%	식	204,020,727	57,303,364	55,586,486	112,889,850
4.총 용역비	1	식	2,244,228,000	630,337,000	611,451,350	1,241,788,350

끝.