문서번호	도시철도토목부-16451
결재일자	2017.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목1과장	도시철도토목부장
엄상민		代김용선	12/15 代호경수
협 조
	주무관			김민규
	주무관			박지영
	주무관			박명기
	주무관			김용선

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사(총괄8회, 9차2회)』

계약금액 및 물량 조정 검토 보고

2017. 12

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사(총괄8회, 9차2회)』

계약금액 및 공사물량 조정 검토 보고

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사』와 관련 책임감리원으로부터 총괄8회, 9차2회에 대한 계약금액 및 물량 조정 요청이 있어 이에 대한 검토 보고임. ※ 벽산엔지니어링㈜ 벽산(E)179FGC-00037호(‘17.12.14)

1		사업 개요

○ 공 사 명 : 지하철9호선 3단계 920공구 건설공사

○ 공사개요 : 연장1,390.5m

(터널934.5m, 정거장1개소, 본선환기구4개소)

○ 공 사 비 : 157,562백만원(9차 : 25,535백만원)

○ 공사기간 : ‘10.09.20 ~ ‘18.12.31

(9차 : ‘17.02.06 ~ ‘17.12.31)

○ 시공회사 : 롯데건설(주)외 1개사

○ 감 리 사 : 벽산엔지니어링㈜

○ 차수공사 준공 및 발주현황

(단위 : 백만원)

구 분	총 괄	준공(1~8차)	9차	장래	비 고
공사기간	‘09.12.30 ~‘18.12.31	‘09.12.30 ~‘16.12.31	‘17.02.06 ~‘17.12.31	-
공사비	157,562 (1,371)	121,025	25,535 (1,371)	11,002

※ ( )괄호는 세입세출외 현금(광역상수도 이설공사 : 한국수자원 수탁공사분)

2		추진 경위

○ ‘11.12.14 : 강원지역 제설장비지원 장비비 지급계획(본부장 방침)

○ ‘16.06.24 : 9호선3단계 사후환경영향조사 용역 개선방안 검토(본부장 방침)

※ 업무지시전 통보(본부→9호선3단계 감리단)

○ ‘16.12.13 : 공사손해보험 변경(기간연장) 승인 통보(본부→감리단)

○ ‘16.12.14 : 총괄8회 및 8차2회 계약금액 조정 요청(감리단→본부)

3		보고 내용

□ 총괄8회 변경 현황

○ 계약금액 조정내역 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감
공사기간	‘09.12.31～‘18.12.31	‘09.12.31～‘18.12.31	변경없음
공사비	157,561,856	159,474,424	증)1,912,568

○ 변경 사유

- 사업기간 연장 및 공사비 증액에 따른 공사손해보험 반영(금1,873백만원)

․순계약금액 증액 : 금248백만원(증)

․‘16년말 기간연장 금액 : 금524백만원(증)

․‘18년말 기간연장 금액 : 금1,101백만원(증)

- 사후환경영향조사 비용 반영 :금35백만원(증)

- 강원지역 제설장비지원 장비비 반영 : 금4백만원(증)

○ 공사비 조정 현황

(단위 : 백만원)

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 감
토 목	본선개착	11,385	11,385
	본선터널	30,395	30,395
	934정거장	20,739	20,739
	본선환기구	16,252	16,252
	기 타	2,658	2,658
	소 계	81,429	81,429
건축		4,255	4,255
전기		3,804	3,804
기계설비		10,227	10,227
직접공사비계		99,715	99,715
제 경 비		29,308	29,308
설계비 외		10,166	10,166
물가변동(1∼4회)		14,649	14,649
광역상수도 이설		1,372	1,372
공사손해보험료		2,352	4,225	증)1,873
사후환경조사용역			35	증)35
강원지역 제설장비 지원			4	증)4
도급금액		157,562	159,474	증)1,912

□ 9차2회 변경 현황

○ 계약금액 조정내역 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감
공사비	25,534,596	24,812,000	감)722,596
공사기간	‘17.02.06～‘17.12.31	‘17.02.06～‘17.12.31	변경없음

○ 변경 사유

- 공사손해보험료 추가납입분, 사후환경영향조사 용역비, 강원지역 제설장비지원 장비비 반영

- 지장물 복구공사 시행을 위한 유관기관(통신, 도시가스, 상수도 등)과의 협의 기간 소요 및 광역상수도 이설공사와 관련 수자원공사와의 협의 기간 소요에 따른 시공물량 조정

○ 설계 물량조정 현황(9차 공사)

구 분	구 간	공 종	단위	수 량			비 고
				당 초	변 경	증 감
9차	본선개착	되메우기	m3	40,693	27,943	감)12,750
		구조물	m3	2,749	2,749	-
	본선터널	대피손잡이	m	-	233	증)233
	934정거장	되메우기	m3	25,162	9,033	감)16,129
		구조물	m3	4,128	3,367	감)761
	본선환기구	되메우기	m3	32,306	27,895	감)4,411
		구조물	m3	5,592	5,172	감)420
	광역상수관 이설		m	542	444	감)98
	건축		식	1	1	1
	전기		식	1	1	1
	기계		식	1	1	1

○ 공사비 조정 현황

(단위 : 백만원)

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 감
토 목	본선개착	1,716	1,313	감)403
	본선터널	28	30	증)2
	934정거장	2,429	1,756	감)673
	본선환기구	2,359	1,979	감)380
	기 타	50	58	증)8
건 축		2,303	2,303
전 기		2,398	2,498	증)100
기계설비		5,418	5,639	증)221
직접공사비계		16,701	15,576	감)1,125
제 경 비		4,419	3,981	감)438
물가변동(1∼4회)		2,879	2,694	감)185
시설분담금 외		164		감)164
광역상수도 이설공사		1,372	649	감)723
사후환경조사용역			35	증)35
강원지역 제설장비 지원			4	증)4
공사손해보험료			1,873	증)1,873
도급금액		25,535	24,812	감)723

4		책임감리원 검토의견

○ 총괄8회 및 9차2회 설계변경에 대해 검토한 결과

- 총괄8회

․발주처 방침에 의거 공사손해보험료, 사후환경영향조사 용역비, 강원지역제설 장비비를 적절히 반영한 것으로 판단됨.

- 9차2회

․지장물 복구공사 시행을 위한 유관기관(통신, 도시가스 등)과의 협의 기간 소요 및 광역상수도 이설공사와 관련 수자원공사와의 협의 기간 소요에 따른 시공물량 조정

․감소된 시공물량은 공사손해보험료, 사후환경영향조사 용역비, 강원지역제설 장비비 금액으로 반영

○ 따라서, 상기 내용이 반영된 총괄8회 및 9차2회에 대한 변경계약이 적정하다고 판단됨.

5		조치 계획

○ 책임감리원 검토의견과 같이 총괄8회 계약금액 조정 및 9차공사 물량조정에 따른 계약금액 변경에 대해 설계변경 처리코자 함.

- 계약금액 조정 내역(총괄8회 및 9차2회)

(단위 : 천원)

구 분	공사비			계약기간		비고
	당 초	변 경	증감	당 초	변 경
총괄 8회	157,561,856	159,474,424	증)1,912,568 (특별회계)	‘09.12.31 ~‘18.12.31	변경없음
9차 2회	25,534,569	24,812,000	감)722,596 (세입세출외현금)	‘17.02.06 ~‘17.12.31	변경없음

※ 예산 구분 내역(총괄8회 및 9차2회)

(단위 : 천원)

구 분	공사비(당초)		공사비(변경)		비 고
총괄 8회	157,561,856		159,474,424		증)1,912,568 (특별회계)
	156,190,260 (특별회계)	1,371,596 (세입세출외현금)	158,102,828 (특별회계)	1,371,596 (세입세출외현금)
9차 2회	25,534,569		24,812,000		감)722,596 (세입세출외현금)
	24,163,000 (특별회계)	1,371,596 (세입세출외현금)	24,163,000 (특별회계)	649,000 (세입세출외현금)

붙 임 : 감리검토 의견서 및 관련 자료 1부.  끝.