문서번호	시설관리과-35618
결재일자	2017.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설관리팀장	시설관리과장
윤혜정	박종일	12/18 최명익
협 조

설계변경(정산) 검토 보고

(제기동 1152-10~142-12외 4개소 배급수관 정비공사)

2017. 12.

동부수도사업소

(시설관리과)

설계변경(정산) 검토 보고

우리 사업소에서 시행중인 「제기동 1152-10~142-12외 4개소 배급수관 정비공사」와 관련하여 서울시설공단의 설계변경(정산) 검토보고서가 접수됨에 따라 검토 후 아래와 같이 설계변경(정산)하고자 합니다.

1		공 사 현 황

◯ 공 사 명 : 제기동 1152-10~142-12외 4개소 배급수관 정비공사

◯ 공사개요 : ********************

◯ 공사기간 : *************************

◯ 도 급 액 : ************

◯ 시 공 사 : ******************

◯ 감독기관 : 서울시설공단(공사감독2처)

2		보 고 내 용

▢ 「제기동 1152-10~142-12외 4개소 배급수관 정비공사」와 관련하여 서울시설공단에서 검토 후 시행한 설계변경 내역의 부적정 항목이 확인되어 추가 변경 후 처리하고자 함.

◯ 나사조임식이음관접합(야간/20㎜,25㎜,30㎜,40㎜,50㎜) 낙찰률 이중 적용 수정

◯ 부설공 중 당초 계약 대비 초과 물량에 대한 지세할증 제외적용 누락 공종 반영(2공종)

- 단수천공분기점분기[300×25~30㎜(야간)] 및 K.P 죠인트관 접합공[150㎜(야간)]

◯ 철개고정장치 나사조임 수량 부적정

- 당초 : (주간) 1개소, (야간) 17개소

- 변경 : (주간) 3개소, (야간) 51개소

◯ 보행안전도우미(10~30m)를 교통정리원(1조1인)으로 변경하여 반영

◯ 사급자재 중 모래(환토재) 물량 오류 수정

- 당초 : 1,068㎥

- 변경 : 1,706㎥

▢ 공사비 증․감 현황

구분		당초(공단 검토)	변경(사업소 검토)	증 ․ 감
공사비		753,700,000	767,490,000	(증) 13,790,000
도급비	공급가액	685,181,819	697,718,182	(증) 12,536,363
	부가가치세	68,518,181	69,771,818	(증) 1,253,637
	계	753,700,000	767,490,000	(증) 13,790,000

3		조 치 계 획

▢ 상기와 같이 공단에서 시행한 설계변경 내역을 수정하여 설계변경을 시행하고자 합니다.

붙 임 : 1. 변경설계서[공단검토(당초) 및 사업소검토(변경)] 1부.

2. 검증확인서 1부.  끝.