문서번호	도시관리과-14069
결재일자	2017.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시경관팀장	도시관리과장
심상훈		한영환	12/18 임창수
협조
	주무관		박흥기

2017회계연도 도시경관개선사업

이월(사고, 명시) 추진계획

2017. 12.

도시계획국

(도시관리과)

2017회계연도 도시경관개선사업

이월(사고, 명시) 추진계획

2017년 도시경관개선사업 추진 중 자치구로부터 요구된 이월 대상사업에 대하여 검토하고 다음과 같이 이월 조치하고자 함

□  추진근거

□  2017회계연도 세출 및 기금 사고이월 추진 알림

(예산담당관-14170호, 2017.12.6.)

□  2017회계연도 도시경관개선사업 사고이월 대상사업 제출(시→구)

(도시관리과-13687호, 2017.12.7.)

□  사업개요

□ 위 치 : 성동구 성수동 등 11개소

(성동구2, 광진구, 중랑구2, 도봉구2, 강서구2, 영등포구2)

□ 기 간 : ’17.01.01.~’18.09.30.

□ 총사업비 : 6,250,632천원(당해-4,270,000천원, 명시-1,980,632천원)

□  사업별 이월내역

□  사고이월 내역 : 11건 4,207,356,180원

- 성동구 성수동 수제화거리 --------------------------- 469,850,000원

- 성동구 성수동 상원길 ------------------------------- 563,851,000원

- 광진구 화양동 건대입구역 주변 ----------------------- 50,000,000원

- 중랑구 망우동 맛솜씨길 ----------------------------- 465,796,500원

- 중랑구 상봉동 상봉중앙로 --------------------------- 478,353,000원

- 도봉구 도봉2동 도봉역 주변 ------------------------- 449,912,500원

- 도봉구 창3동 -------------------------------------- 206,020,000원

- 강서구 화곡1동 등 --------------------------------- 603,571,580원

- 강서구 개화동 등 ----------------------------------- 520,888,350원

- 영등포구 양평동 ------------------------------------ 159,645,120원

- 영등포구 문래동 ------------------------------------ 239,467,680원

□  명시이월 내역 : 1건 450,000,000원(기추진, 2017.10.~)

- 광진구 화양동 건대입구역 주변----------------------- 450,000,000원

□  사고이월 요구 세부내역

□  예산과목 : 도시건축공동위원회 운영 등, 소외·낙후지역 도시경관개선, 시설비(401-01)

□  이월 세부내역

구 분	예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사고이월액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
[사고이월]	5,180,631,820	4,683,031,500	4,405,080,090	251,357,000	4,207,356,180 (53,633,090)	271,918,640
성수동 수제화거리	482,417,660	469,850,000	469,850,000	0	469,850,000	12,567,660
성수동 상원길	582,417,660	563,851,000	563,851,000	0	563,851,000	18,566,660
광진구 화양동	500,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0
중랑구 망우동	465,796,500	465,796,500	465,796,500	0	465,796,500	0
중랑구 상봉동	550,000,000	550,000,000	550,000,000	71,647,000	478,353,000	0
도봉구 도봉역	500,000,000	500,000,000	449,912,950	0	449,912,950	50,087,050
도봉구 창3동	300,000,000	300,000,000	285,000,000	78,980,000	206,020,000	15,000,000
강서구 화곡1동	700,000,000	700,000,000	631,253,580	27,682,000	603,571,580	68,746,420
강서구 개화동 등	600,000,000	600,000,000	544,616,350	23,728,000	520,888,350	55,383,650
영등포구 양평동	200,000,000	193,228,000	157,919,880	19,728,000	159,645,120 (21,453,240)	20,626,880
영등포구 문래동	300,000,000	290,306,000	236,879,830	29,592,000	239,467,680 (31,179,850)	30,940,320
[명시이월]					명시이월액
광진구 화양동		0	0	0	450,000,000	0
총 이월액					4,657,356,180

※ 일부사업은 원인행위 및 지출 미확정된 상태로 수정가능

(지출액 수정 및 최종확인-2018.1.3.(수) 한

□  사고이월사유

- 성동구 2개 사업은 구비 확보 지연으로 인한 ’17.11월 공사발주로 절대공기 부족(2018.09.30. 준공예정)

- 광진구 사업은 설계용역 2회 유찰, 기본 및 실시설계 용역기간 10개월 소요 등으로 용역기간 부족(2018.01.22. 완수예정)

- 중랑구 2개 사업은 기본 및 실시설계 용역기간 10개월 소요 등으로 망우동 사업은 ’17.09월 공사 발주, 상봉동 사업은 ’17.12월 공사 발주되어 절대공기 부족

- 도봉구 도봉역, 강서구 화곡동 및 개화동 사업, 영등포구 양평동 및 문래동 사업 등 5개 사업은 기본 및 실시설계 용역기간 10개월 소요 등으로 ’17.11월~12월 공사 발주되어 절대공기 부족

- 도봉구 창3동 사업은 설계용역 2회 유찰로 설계·시공 일괄입찰로 사업추진함에 따라 ’17.06월 착수하여 준공기한 미도래

□  명시이월사유

- 광진구 화양동 사업은 설계용역 2회 유찰, 기본 및 실시설계 용역기간 10개월 소요 등으로 설계용역이 2018.01.22. 완수예정임에 따라 당해연도 공사발주 불가

붙임 1. 2017회계연도 사고이월 요구서(엑셀서식) 1부.

2. 사고이월 사업별 명세서 1부.

3. 지출원인행위 미필 이월명세서 1부.

4. 2016회계연도 사고이월 집행현황 1부.

5. 2016회계연도 명시이월 집행현황 1부.  끝.