투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	기성금 지급요청(제2차3회)[9호선 3단계 1구간 송변전공사]

1. 서지9-3 시감 제17-828(2017.12.15.)호와 관련 입니다.

2.「서울지하철 9호선연장건설(3단계) 1구간 송변전공사(2차)」추진과 관련,시공사로부터 제2차 3회 기성금 신청이 있어 감리단으로부터 기성검사를 완료하고, 관련서류를 송부하오니 본 공사의 계약자에게 기성금이 지급될 수 있도록 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철 9호선 연장건설 3단계 1구간 송변전공사 (2차)

나. 공사기간 : 2016. 12. 01 ~ 2018. 02. 04.

다. 계약금액 : 4,875,172,000원(총공사비 : 5,875,172,000원)

라. 계 약 자 : 거성일렉콤(주) 대표이사 박성래  외 1인

마. 검 사 일 : 2017. 12. 14.

바. 금회 기성내역(제2차 3회)

[단위: 원]

구 분	계 상 금 액			비고
	합계	거성일렉콤(주)	동일전력(주)
계 약 금 액	4,875,172,000	2,486,337,720	2,388,834,280
선금급 금액 (기 정산액)	1,000,000,000 (626,135,000)	510,000,000 (319,328,850)	490,000,000 (306,806,150)
금회 기성액	1,236,600,000	630,666,000	605,934,000	25.36%
누계 기성액	4,295,600,000	2,190,756,000	2,104,844,000	88.11%
금회 선금정산액	373,865,000	190,671,150	183,191,850	선금잔액 0 원
금회 실지급액	862,735,000	439,994,850	422,740,150
기성 잔액	579,572,000	295,581,720	283,990,280	11.89%

사. 예산과목

도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도 9호선 3단계 건설, 시설비 및 부대비 (시설비)

따로붙임 : 1. 기성검사 (제2차3회) 결과보고 1부.

2. 기성내역서(제2차3회) 1부.   끝.

	도시철도설비부장
주무관	이재영		송변전과장	김영수		도시철도설비부장	12/18 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-15152	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7271	/전송	02-772-7308	/	lolee@seoul.go.kr	/	부분공개(5)