문서번호	시설보수과-10602
결재일자	2017.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김승진		12/18 박병연
협 조
	주무관			윤동원
	주무관			김규춘

-도로시설물일상유지보수공사(터널등)-

예비준공검사 결과보고

2017.  12.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

시설보수과

예비 준공검사 결과보고

2017년도 예산사업으로 시행중에 있는『도로시설물일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)』에 대한 예비준공검사를 실시하고 결과를 보고드림

Ⅰ		관련근거

❍ 기술심사담당관-2158(2014.2.6) -- 예비준공검사 이행실태 보고

❍ 시설보수과-7872(2017.9.13) -- 예비준공(기성)검사 실시계획

Ⅱ		공사개요

❍ 공 사 명 : 2017년 도로시설물일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)

- 공사규모 : 포장보수공 65a, 신축이음보수공 180m, 방수공 1,400㎡ 등

- 공사기간 : 2017. 4. 27 ~ 12. 31

- 도 급 자 : ㈜서영씨앤씨 대표 박성훈

- 도 급 비 : 769,167,000원

- 공 정 율 : 98%

Ⅲ		예비준공검사 개요

□ 검사개요

❍ 일  시 : 2017. 12.15.(금) 14:00~17:00

❍ 검사자 : 시설보수과 시설6급 윤동원, 시설7급 김규춘

❍ 주요 검사사항

- 아스콘재포장, 단면보수, 점검통로설치 등 전반적인 사항 확인

□ 검사결과 : 지적사항 없음

□ 예비 준공검사 사진

도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개) 도림천복개(좌안)교각부 단면보수 검사(6차 작업지시)	도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개) 도림천복개(좌안) 오거리 재포장 검사(9차 작업지시)
도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개) 화곡터널내 보행로고무메트 설치검사(11차 작업지시)	도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개) 가마산고가차도 점검통로 설치 검사(13차 작업지시)

Ⅳ		향후계획

□ 2017.12.18 : 공사완료 보고 및 설계변경

□ 2017.12.20 : 설계변경 계약 및 준공계 접수

□ 2017.12.21 : 준공검사원 지정 및  준공검사

□ 2017.12.22 : 공사 준공

붙임 : 예비준공검사조서 1부.  끝.