문서번호	도로보수과-13336
결재일자	2017.12.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
이상하		강종훈	12/18 배광환
협조
	주무관		정병구

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

2017년 포장도로 긴급 복구공사(연간단가)  설계변경(제3회, 최종) 시행계획보고

2017.12.18.

서부도로사업소

[도로보수과]

2017년 포장도로 긴급 복구공사(연간단가)  설계변경(제3회, 최종) 시행계획보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2017. 2.24 ~ 2017.12.31

○ 시 공 사 : (주)한국포도건설  대표 장래철

*********************

**********************************************

□ 관련근거

○ 삼일대로 중앙버스전용차로 개선시행 예산배정 및 시행통보

- 교통운영과-9075(2017. 5. 2)

○ 남산1호터널 접속도로 포장정비 요청에 따른 포장복구 반영

- 민생사법경찰단-16946(2017. 8. 9)호와 관련임

○ 2017년 노후포장도로정비공사 예산 추가 배정

- 도로관리과-17957(2017.11. 3)

○ 2017년 노후포장도로정비공사설계변경(최종, 2회)검토보고

- 도로보수과-12117(2017.11.15)호와 관련임

□ 보고내용

○ 상기와 같이 유관사업 요청 및 추가 예산 확보에 따라 겨울철 대비 포장파손(침하, 포트 홀, 균열, 탈락 등)에 대해 사전 작업지시 및 긴급복구하고 시공물량에 대해 정산 설계변경을 시행하고자 함.

차수별 작업지시	기 간	단위	완료수량(a)	작업지시 관련문서
11차 작업	11.4 ~ 11.20	a	15.6	도로보수과-11674 (2017.11. 3)
12차 작업	11.16 ~ 12. 4	a	12.8	도로보수과-12122 (2017.11.15.)
13차 작업	11.22 ~ 1 2.27	a	43.1	도로보수과-12375 (2017.11.22.)
14차 작업	11.30 ~ 12.20	m	2,170	도로보수과-12617 (2017.11.29.)

□ 설계변경금액 및 정산물량

○ 설계변경금액

구 분	설계 변경 금액
	당초금액	변경금액	증 ․ 감
총사업비	*************	*************	*************
도 급 비	*************	*************	**************
관 급 비	*************	*************	**************

【예산과목】

‧ 도로관리, 도로시설물, 도로 및 도로부속시설물, 노후포장도로정비공사,시설비

○ 설계변경수량

주요공종	단위	설계 변경 수량		증․ 감
		당초	변경
소규모 포장복구	a	176.8	224.0	증)47.2
절삭후아스팔트덧씌우기	a	9.1	24.3	감)15.2
균열보수(증산로)	m	0	2,170	증)2,170

□ 조치계획

○ 상기와 같이  공종별 시공물량에 2017포장도로긴급복구공사(연간단가) 제3회(최종) 정산 설계변경시행

- 2017.12.19: 설계변경(제3회,최종)계약

- 2017.12.22: 공사준공

※ 정산설계변경 소요예산 확보현황                        (단위: 백만원)

사 업 명	계	추가예산 재배정	노후포장도로정비공사 집행잔액
******** **********	***	***	***

- 예산과목: 안전총괄본부 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리(도시개발), 노후포장도로 정비공사

붙임: 1) 개략(제3회)정산설계변경내역서1부.

2) 유관사업 포장정비요청, 사업배정 관련 문서사본 각1부.

3) 계약금액조정검증서1부.  끝.