문서번호	건축부-21787
결재일자	2017.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	문화시설과장	건축부장
박윤수	최달수	12/18 代박범규

『체부동 생활문화센터 조성공사』

예비준공검사 결과 보고

2017.12.

도시기반시설본부

(건축부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『체부동 생활문화센터 조성공사』

예비준공검사 결과 보고

『체부동 생활문화센터 조성공사』의 내·외부 공사의 마감상태 등을 사전 점검하여 시설물 인수· 인계에 차질이 없도록 각 분야 공사관리관, 사업의뢰부서 및 운영부서와 합동점검을 실시하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		사업개요

○ 공 사 명 : 체부동 생활문화센터 조성공사

○ 위    치 : 종로구 체부동 자하문로1나길 3-2외 2필지

○ 규    모 : 지상1층, 353.56㎡

○ 공사기간 : `17.05.31.~`17.12.30.

○ 공사금액 : 653,950,000원

○ 시 공 자 : ㈜하웅종합건설

○ 감 리 자 : 지요건축사사무소

Ⅱ		예비준공검사 개요

□ 예비 준공검사 계획

○ 일    시 : 2017.12.15.(금) 10:00~15:30

○ 장    소 : 체부동 생활문화센터 조성공사 현장

○ 점 검 자(분야별 합동점검)

- 사업의뢰부서(문화시설과) : 담당주무관

- 운영부서(문화정책과) : 담당주무관

- 도시기반시설본부 : 분야별 공사관리관(건축, 전기, 기계)

- 건축사 감리

○ 입 회 자

- 현장대리인

Ⅲ		점검 결과

○ 한옥부분 창호 미서기창의 울거미 맞닿는 부분에 크기의 오차가 있어 전체적인 확인 후 수정해야 함

○ 보조연습실 천장 AL몰딩과 석고보드 위 페인트 마감부위에 이격이 발생하여 보수 조치 요함

○ 녹막이칠 미시공 철물은 마감 전 반드시 광명단 도포 요함

○ 교회 부분 연습실 및 사무실 마감은 설계, 감리자와 사전 협의하여 깔끔하게 마감 요함

○ 냉난방기 실외기 패드 설치 요함

○ 건물 외부에 설치된 선로(전기, 통신) 보완 방안 강구

○ 패키지 에어컨 주변부(문, 벽) 방음처리 요함

Ⅳ		행정사항

○ 예비준공검사 지적 및 보완 요청된 사항은 조속히 보완할 수 있도록 건축사감리 및 현장대리인에게 조치 통보

Ⅴ		향후계획

○ 2017.12.26. : 지적사항에 대한 보완조치 완료 후 준공 청소 등

○ 2017.12.30. : 공사준공

붙 임 : 1. 예비준공검사 점검표 1부.

2. 예비준공검사 참석조서 1부.  끝.