문서번호	교육정책과-8285
결재일자	2017.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교육환경지원팀장	교육정책과장
손경이	정현석	12/18 배형우

’17년 꾸미고 꿈꾸는

학교화장실 만들기 모니터링 결과

2017.12.

평생교육국

(교육정책과)

’17년 꾸미고 꿈꾸는

학교화장실 만들기 모니터링 결과

	’17년 학교화장실 만들기 사업을 추진한 학교에 대하여 준공 현황을 점검하고, 그 결과를 보고 드림

□ 모니터링 개요

❍ 추진근거 : 교육경비 보조에 관한 조례 제9조(교육지원사업의 평가·관리)

❍ 기    간 : ’17.11.20.~11.24.

❍ 대    상 : 27개교(기 준공된 56개교 중 선정)

❍ 점검요원 : 함께꿈 학부모단, 함께꿈 홍보지기

❍ 점검방법 : 해당 학교 직접 방문·점검

- 학교를 직접 방문하여 점검표에 의한 모니터링 실시

❍ 점검사항

- 학생·학부모 및 전문가 의견이 설계에 반영되었는지 여부

- 화장실 디자인 TF운영상 애로사항 및 개선방향 등 의견수렴

- 학교 화장실 기능 충족 여부

- 학교 관계자(교사, 학생 등)의 개선 만족도

- 개선된 화장실에 대한 현장사진 확보 등

❍ 결과보고서 제출

- 함께꿈 학부모단 : 함께꿈 학부모단 커뮤니티로 제출

- 함께꿈 홍보지기 : 함께꿈 홍보지기 블로그로 제출

□ 모니터링 결과

❍ 총  평

◆ 화장실 개선 과정에 디자인 TF팀 의견이 반영되어 이용자 편의를 고려한 감성공간으로 조성

- 양변기 적정비율 설치, 무장애 설계, 시설의 마감상태 양호, 그린화장실 조성 등

- 온수시설, 조명시설, 폐위생품 수거함 설치, 비누 비치 등 부대시설 설치 양호

◆ 학생·교사·학부모 등 만족도 높음

- 생리적 기능 해결 뿐만 아니라 시각적 이미지 효과가 높아 미보수 화장실에 대한 지속적 개선 필요

❍ 세부 점검내역

연번	점검사항	모니터링 결과
1	학교화장실 로고 부착 여부	- 대부분 학교 준수(3개교 미부착)
2	화장실 컨셉(주제)	- 자연 친화적 화장실을 강조하는 ‘자연’, ‘사계’, ‘꿈’ 등
3	학교 화장실 기능 충족여부	- 양변기·화변기 적정비율 유지 - 칸막이 및 문고리 부착 상태 양호 - 자연 친화적 마감 자재 사용 등 대체로 양호
4	기타 부대시설 설치여부	폐위생품 수거함, 휴지통 비치 비누는 대부분 비치 선반 및 탈의실 설치 등 이용자의 편의를 고려함
5	학교 화장실 개선 지원조건 이행여부	디자인 TF팀 의견이 화장실 보수에 반영
6	학생·교사·학부모 등 만족도	기존 화장실의 노후화도가 심해 개선된 화장실에 대한 만족도는 매우 높음
7	화장실 사용 관리	학생의 화장실 사용을 고려한 간단한 설명서 등이 부착되어 있었으며, 보수하지 않은 화장실에 대한 개선을 희망하고 있음

❍ 잘 된 점

- 그린 화장실 조성에 기여

▸다수 학교가 LED조명 및 절수형 변기 시공, 자연친화적 마감재 사용 시공

- 화장실 개선 후 학생대상 화장실 사용 교육 실시, 학생의 사용을 고려한 간단한 설명서 부착 등

- 사용자 의견을 반영한 디자인과 이용자의 편의를 고려한 탈의실 설치 등 감성공간으로 조성

❍ 개선의견

- 여름방학 내 공사를 완료하려고 하였으나, 예상치 못한 문제 등 발생으로 공기가 길어져 학생들이 소음 등 학습에 불편을 겪음

➡ 사업을 앞당기는 시기조정 필요

- 일부 마감처리(벽면 타일 균열, 타일 탈락 등) 미흡

➡ 시공업체의 하자보수 조치 필요

- 환경은 잘 정비 되었으나 청소 불량으로 냄새가 난다는 의견이 일부 있음

➡ 지속적인 관리를 통한 화장실 청결 유지 필요

□ 조치계획

❍ 하자가 발생한 학교는 공사업체를 통해 조속히 보수토록 조치(교육지원청 협조)

❍ 학교화장실 로고가 미부착된 일부 학교는 즉시 부착토록 조치

붙임 : 학교화장실 모니터링 점검표 1부.