문서번호	기전과-16447
결재일자	2017.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기전과장
김동현	12/18 정판식

2017년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

설 계 변 경  보 고 (최종)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12

동부도로사업소

(기전과)

2017년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

설 계 변 경  보 고 (최종)

2017년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)에 대하여 아래와 같이 정산 설계변경을 시행하고자 함.

관련근거

○ 설계변경서류 제출 [(주)건양엔지니어링 218(`17.12.18.)]

○ 2017년 교통안전표지 유지보수공사 낙찰차액 사용계획 (기전과-14011, `17.10.24)

○ 도로교통소통개선 교통안전시설 개선공사 시행계획 (기전과-8740,`17.6.28)

○ 소방관서 긴급출동 신호시스템 구축공사 시행계획 (기전과-9057,`17.7.04)

○ 조명식 및 발광형 교통안전표지 구매설치 계획 (기전과-14746,`17.11.09)

공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2017. 03. 02 ~ 2017. 12. 20

○ 계약금액 : ***********

○ 계 약 자 : **********

○ 감 리 원 : ********************************

설계변경 내용

○ 계약물량 및 계약금액 변경

- 당초 계약물량을 1차 ~ 6차 작업완료에 따른 실제 작업물량으로 변경

- 낙찰차액 사용계획 및 개선공사 시행계획에 따른 계약금액 변경

설계변경 금액 ************                    (단위 : 원)

구 분		변경전 금액	변경후 금액	증 · 감
총공사비		**********	***********	************
도급비	공급가액	**********	**********	************
	부가가치세	*********	*********	************
	계	**********	***********	************

보고자 의견

○ 상기와 같이 물량 증·감 사항에 대하여 설계변경을 시행하고자 함.

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 낙찰차액 사용계획 및 개선공사 시행계획 각 1부.

3. 설계변경제출 공문 1부

4. 제비율검증확인서 1부.  끝.