아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	협의지연에 따른 심사결과 보고(디진털3단지~두산길간 지하차도건설공사 폐기물처리용역)

1. 심사 중 아래와 같은 사유로 처리기한이 지연되어 보고합니다.

가. 지연사유: 심사결과 30%이상 절감율에 대한 협의 중 발주처에서 내역서 공종별

적용에 대한 이견이 있어 수차례 협의 진행으로 5일 지연됨

1) 처리기한 및 통보일

- 처리기한: 2017.10.31. ~ 11.13.

- 심사통보일: 2017.11.20.

2) 협의 진행사항

11.7(서울시통합메일,1차 협의),11.08(서울시통합메일,2차 협의),11.9(서울시통

합메일, 회신 촉구),11.09(서울시통합메일, 협의회신),11.13(서울시통합메일, 3차

협의, 토목심사팀장),11.14(서울시통합메일, 이견제출, 발주처과장),11.14(서울시

통합메일, 이견제출에 대한 회신, 토목심사팀장),11.15(서울시통합메일, 회신 촉구, 심

사담당),11.17(서울시통합메일, 발주처담당 이견제출),11.20(서울시통합메일, 협의

촉구, 심사담당),11.20(서울시통합메일, 협의수용, 발주처과장)

끝.

주무관	조성도		토목심사팀장	代신정		계약심사과장	11/21 안호
협조자
시행	계약심사과-21070	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서울시청 서소문별관 제1동 9층)	/	http://seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개