문서번호	교통운영과-24301
결재일자	2017.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
이문석		신근호	12/18 강진동
협조

- 2017년 교통안전시설물(노면표시 등) 설치공사 - 건설사업관리(감리) 용역 설계변경(정산) 보고

2017. 12.

도시교통본부

(교통운영과)

- 2017년 교통안전시설 설치공사 -

건설사업관리(감리) 용역 설계변경(정산) 보고

2017년 교통안전시설물(노면표시 등) 설치공사 건설사업 관리(감리) 용역과 관련하여, 계약기간 변경 및 과업일수 변경으로 인한 계약금액 조정에 따른 설계변경(정산) 검토 보고임.

용역 개요

용 역 명 : 2017년 교통안전시설(노면표시 등) 설치공사 건설사업               관리(감리) 용역

계약범위

권 역 별	사 업 소	자 치 구
동부권역(4개 지역)	동부도로사업소	강남구, 송파구, 강동구
서부권역(6개 지역)	서부도로사업소	중구, 용산구, 마포구, 서대문구, 은평구
남부권역(5개 지역)	남부도로사업소	동작구, 금천구, 관악구, 서초구
북부권역(6개 지역)	북부도로사업소	종로구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구
성동권역(5개 지역)	성동도로사업소	중랑구, 동대문구, 성동구, 광진구
강서권역(5개 지역)	강서도로사업소	강서구, 양천구, 구로구, 영등포구

계약현황

구 분	계약업체	계약금액(원)	계약일자	착수일자	준공기한	비고
동부권역	㈜건양엔지니어링	96,371,680	‘17.3.27.	‘17.3.29.	‘17.12.29.
서부권역	㈜태영알앤디	106,040,000	‘17.3.27.	‘17.3.29.	‘17.12.29.
남부권역	㈜트래픽스	96,284,000	‘17.3.27.	‘17.3.29.	‘17.12.29.
북부권역	㈜트래픽스	103,932,000	‘17.3.27.	‘17.3.29.	‘17.12.29.
성동권역	㈜태영알앤디	106,040,000	‘17.3.27.	‘17.3.29.	‘17.12.29.
강서권역	㈜트래픽스	96,284,000	‘17.3.27.	‘17.3.29.	‘17.12.29.

설계변경 내용

계약기간 변경

구분		동부권역	서부권역	남부권역	북부권역	성동권역	강서권역
계약기간	당초	‘17.3.27~ ‘17.12.29	‘17.3.27~ ‘17.12.29	‘17.3.27~ ‘17.12.29	‘17.3.27~ ‘17.12.29	‘17.3.27~ ‘17.12.29	‘17.3.27~ ‘17.12.29
	변경	‘17.3.27~ ‘17.12.22	‘17.3.27~ ‘17.12.22	‘17.3.27~ ‘17.12.22	‘17.3.27~ ‘17.12.22	‘17.3.27~ ‘17.12.22	‘17.3.27~ ‘17.12.22

실 투입일수 정산

구분	동부권역		서부권역		남부권역		북부권역		성동권역		강서권역
	중급	초급	중급	초급	중급	초급	중급	초급	중급	초급	중급	초급
당초	97	93	97	93	97	93	97	93	97	93	97	93
변경	85	82	88	82	87	86	89	85	84	82	91	88

※ 투입일수는 실제 투입된 일수에 참여율을 반영한 평일, 휴일, 야간 투입 일수를 합한 날자임

설계변경 내역

지 역	당 초(원)	변 경(원)	증 감(원)	비 고
동부권역	96,371,680	86,310,000	감)10,061,680	㈜건양엔지니어링
서부권역	106,040,000	95,072,900	감)10,967,100	㈜태영알앤디
남부권역	96,284,000	89,426,000	감)6,858,000	㈜트래픽스
북부권역	103,932,000	96,292,000	감)7,640,000	㈜트래픽스
성동권역	106,040,000	91,965,800	감)14,074,200	㈜태영알앤디
강서권역	96,284,000	93,385,000	감)2,899,000	㈜트래픽스

조치 계획

상기 사항에 대해 설계변경(정산)을 시행하고자 함.

붙  임 : 각 권역별 설계변경내역서 1부.  끝.