투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	9호선 3단계 시스템감리단 책임감리원
(경유)
제목	지하철 9호선 송변전공사 1,2 구간 변경계약서 송부

1. 서지9-3 시감 제17-806호(2017.12.11.) 및 서지9-3 시감 제17-807호(2017.12.11.) 관련입니다.

2. 서울지하철9호선 연장건설 3단계 1, 2구간 송변전공사 변경계약서를 아래와 같이 송부하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

구분		변경전		변경후
		계약금액	준공기한	계약금액	준공기한
송변전공사 1구간	총차	5,885,611,900원	2018년 02월 04일	5,875,172,000원	-
	금차(2차)	4,885,611,900원	2018년 02월 04일	4,875,172,000원	-
송변전공사 2구간	총차	4,703,036,098원	2018년 02월 17일	4,198,400,098원	-
	금차(2차)	3,232,736,098원	2017년 12월 31일	3,198,400,098원	2018년 02월 17일

붙임: 송변전공사 1, 2구간 변경계약서 각 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이재복		송변전과장	김영수		도시철도설비부장	12/18 구자훈
협조자	주무관	이재영
시행	도시철도설비부-15191	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 8층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7272	/전송	772-7308	/		/	부분공개(5)