투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(920공구 , 총괄8회 및 9차2회)

우리본부에서 시행중인『서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사』에 대하여 책임감리사로부터 총괄8회 및 9차2회에 대한 변경계약 요청이 있어 아래와 같이 시행코자 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

나. 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1개사

다. 감 리 사 : 벽산엔지니어링(주)

라. 변경계약 현황

(단위 : 천원)

구 분	공사비			계약기간		비고
	당 초	변 경	증감	당 초	변 경
총괄 8회	157,561,856	159,474,424	증)1,912,568 (특별회계)	‘09.12.31 ~‘18.12.31	변경없음
9차 2회	25,534,569	24,812,000	감)722,596 (세입세출외현금)	‘17.02.06 ~‘17.12.31	변경없음

마. 변경 사유

○ 공사손해보험료, 사후환경영향조사 용역비, 강원지역 제설 장비지원 장비비 반영

○ 지장물 복구공사 및 광역상수도 이설공사 관련 유관기관(통신, 도시가스, 상수도, 한국수자원공사 등)과의 협의 기간 소요에 따른 시공물량 조정

바. 예산과목(9차2회)

○ 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도 9호선 3단계건설, 시설비 및 부대비, 감리비

○ 세입세출외 현금 : 광역상수도 이설공사(한국수자원공사 수탁공사 분)

붙 임 : 검토보고서 등 관련 자료 1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	엄상민		토목1과장	代김용선		도시철도토목부장	12/18 김진팔
협조자	주무관	김용선		경리과장	代김용범		기획예산과장	안순봉
시행	도시철도토목부-16498	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스9층	/
전화	772-7214	/전송	772-7306	/		/	대시민공개