문서번호	기전설비과-4610
결재일자	2017.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
이균형		김남수	12/19 최진석
협조	한강관광사업과장		손창열
	주무관		강윤자

『한강 함상공원 조성(전기,소방)공사』

설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12

한강사업본부

(기전설비과)

『한강 함상공원 조성(전기,소방)공사』

설계변경(정산) 검토 보고

한강 함상공원 조성(전기,소방)공사 시행중 책임감리사로 부터 기존 계약물량 변동 등으로 인한 설계변경(정산) 서류가 제출되어 아래와 같이 검토하고 설계변경(정산) 시행하고자 함.

□ 관련근거

○ 책임감리사 설계변경 서류 제출

- 동해 함상공원 제2017-25호 (2017.12.15)

□ 공사개요

○  공 사 명 : 한강 함상공원 조성(전기,소방)공사

○ 공사기간 : 2017. 10. 23 ~ 2017. 12. 31.

○ 계 약 자 : *************

○ 계약금액 : *************

○ 감리업체 : ******************

□ 설계변경 사유

○ 실제 시공물량에 따라 최종 변경사항(증감) 반영

- 한국전기안전공사 지적에 따른 인입선로 물량 변경

- 안내소 전시물 배치 및  E/V, 전동문, 케이트 전원 등 회로구성 물량 변경

- 안내소 전시물 배치에 따른 조명기구 타입 및 수량 변경

- 서울함, 참수리함 추가 공간활용에 따른 전등 설비공사 물량 변경

- 서울함 윈치 동력설비 및 전등설비 추가 물량 변경

- 인입선로 등 기타 시공물량 변경

○ 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비 미사용으로 인한 감액 반영

□ 설계변경(정산) 금액

(단위:원)

구 분		공 사 금 액		증 ․ 감액	비 고
		당 초	변 경
도급비	공급원가	***********	***********	****************
	부가가치세	***********	***********	****************
	합 계	***********	***********	****************

□ 조치의견

○ 상기 변경사유와 같이 계약물량 대비 실작업 물량의 변동사항 발생으로 인한 증감사항 및 제경비 증감내역을 반영한 사항으로,

○ 책임감리사가 제출한 변경서류 검토결과 물량증감이 적정하게 반영되었다고 사료되어 설계변경(정산) 시행코자 함.

따로붙임 : 1. 책임감리사 설계변경 제출서류 1부.

2. 공사원가 제비율검증표 1부. 끝.