문서번호	시설관리과-35629
결재일자	2017.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
박상현	박종일	12/19 최명익

설계 변경 시행 보고

(장안동 93-27~285-1외 6개소 배급수관 정비공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.12

동부수도사업소

(시설관리과)

설계 변경 시행 보고

(장안동 93-27~285-1외 6개소 배급수관 정비공사)

우리 사업소에서 시행중인「장안동 93-27~285-1외 6개소 배급수관 정비공사」와 관련하여 본부 재무회계과로부터 시공물량 증감 및 신규공종 발생 등에 따른 계약금액 조정 검토를 완료하고 다음과 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

Ⅰ		공 사 현 황

❍ 공 사 명: 장안동 93-27~285-1외 6개소 배급수관 정비공사

❍ 공사기간: 2017.04.24.~2017.12.24.

❍ 도 급 자: 서준산업개발(주) 박영수

Ⅱ		설계 변경 내용

❍ 용역시행에 따른 물량 증감

- 2구간 분기밸브 신설 설치 등

- 각종 보험료 실사용 정산

- 환토 되메우기 및 다짐 등 물량 증감 및 신규공종 발생

Ⅲ		계약금액 조정 결과

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증․감
총공사비		670,891,900	814,550,000	143,658,100
도급비	공급가액	609,901,728	740,500,000	130,598,272
	부가가치세	60,990,172	74,050,000	13,059,828

Ⅳ		조 치 계 획

❍ 상기와 같이「장안동 93-27~285-1외 6개소 배급수관 정비공사」에 대하여 본부 재무회계과 조정 내용을 반영하여 설계변경 시행하고자 합니다.

붙임: 1) 계약금액 조정 결과 통보 1부.

2) 계약금액 검토 결과서 1부.

3) 변경 내역서(당초, 변경) 각 1부.  끝.