시  민

문서번호	행정지원과-32589
보존기간	년
결재일자	2017.12.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	행정관리팀장	행정지원과장
정호남	代민주홍	12/19 이만기

[청사증축관련 빗물이용시설 펌프 등 제작구매 설치]

설 계 변 경(정산) 계 획

2017. 12

동부수도사업소

[행정지원과]

설 계 변 경(정산) 계 획

우리사업소에서 시행중인 “청사증축관련 빗물이용시설 펌프 등 제조․구매 설치공사”와 관련하여 일부 신규공종 발생에 따른 설계변경(정산)을 시행코자 함.

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 청사증축관련 빗물이용시설 펌프 등 제조구매 설치

나. 계약기간 : 2017.11.22 ~ 2017.12.22

다. 계약금액 : 금9,196,000원(금구백일십구만육천원)

바. 도 급 자 : ㈜세원냉열 대표 김희주

2. 설계변경(정산)

가. 사유 : 신규공종 발생에따른 설계변경

나. 변경내역

신규공종	단위	수 량			금 액
		당초	변경	증감	당초	변경	증감
MCC자동제어판넬제작설치	식	0	1	증1	0	332,500
질소압력탱크 50L설치	개소	0	1	증1	0	266,000
소계						598,500
제비용						143,800
소계						742,300	증)742,300

다. 금액변경 : 증742,000원(당초 9,196,000원 ⇒ 변경9,938,300원)

라. 신규공종

- MCC자동제어판넬 제작설치(펌프2대 제어)

- 질소압력탱크 설치(용량50L)

3. 조치계획

- 사업소 자체 심의 후 신규공종 발생에 따른 물량 증 ․ 감으로 설계변경 시행코자 함

※ 자체심의 소위원회 개최

○ 일  정 : 2017.12.19. 10:00

○ 장  소 : 행정지원과 회의실

○ 위원장 : 행정지원과장

○ 위  원 : 행정6급 김태희, 행정6급 민주홍, 기계6급 김점철,

기계7급 봉선필, 토목7급 박상열

붙임 : 설계변경내역서 1부.  끝.