문서번호	급수운영과-30880
결재일자	2017.12.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
류태현	강동길	12/19 최철민
협 조

설계변경 검토 보고

[2017년 가산동 470-1~680간외 1개소 송배수관정비공사]

2017. 12.

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 검토 보고

[2017년 가산동 470-1~680간외 1개소 송배수관 정비공사]

「2017년 가산동 470-1~680간외 1개소 송배수관 정비공사」업무수행중 현장여건 변화에 따라 신규공종 및 물량 증․감이 발생됨에 따라 설계변경을 실시하여 공사시행에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 가산동 470-1~680간외 1개소 송배수관 정비공사

○ 계약기간 : 2017. 5. 1. ~ 2017. 12.31.

○ 계 약 자 : ㈜왕산건설  대표자 김재운

○ 공사개요

구 분	당 초	변 경
공사개요	D=150~600mm, L=2,161m	D=150~600mm, L=1,998m
계약금액	금819,333,900원	금764,214,000원

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제34호)

- 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정

□ 설계변경 사유

○ 현장 시공여건 변화에 따른 신규공종 및 물량변동(증 ․ 감) 발생, 제비율 감액

-「파쇄물기계상차(집하장)(B․H 0.7㎥, 주간)외 102개 공종」물량 변동

-「주철직관 부설공(150mm,야간)외 19개」신규공종 및 자재발생

- 제비율 항목 중 건강보험료 등 사후정산 항목 감액

□ 설계변경 현황

○ 계약금액 변경

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	744,849,000	694,740,000	-50,109,000
부가가치세	74,484,000	69,474,000	-5,010,000
도 급 비	819,333,000	764,214,000	-55,119,000

○ 주요 물량 증 ․ 감 및 신규공종

공 종	규 격	수 량			금 액(원)
		단위	당초	변경
주철직관 부설공	400mm (야간+6차선지세)	m	2,000	1,882	감) 2,683,910
K.P 이탈방지압륜 접합	600mm (야간+6차선지세)	개소	64	43	감) 4,695,306
라인스토핑	600mm(야간)	개소	-	1	증) 25,906,605
원형밸브실 설치공(기초CON)	D=300mm (야간+6차선지세)	개소	16	1	감) 9,120,570
원형밸브실 설치공(기초PE)	D=300mm(야간)	개소	-	11	증) 5,005,572
구형밸브실 설치공	D=400mm (야간+6차선지세)	개소	6	1	감) 13,300,610
적벽돌 쌓기	2.0B, 3.6m 이하 (야간+6차선지세)	천매	17.26	0.76	감) 11,216,668
조명시설 설치 및 철거	손료포함,야간	m	2,430	2,074	감) 1,712,716

○ 제비율 감액(사후정산 항목)

제비율 항목	금 액		증 감
	당초	변경
건강보험료	6,156,054	202,390	감) 5,953,664
연금보험료	9,016,809	7,338,090	감) 1,678,719
퇴직공제부금	7,239,240	2,436,000	감) 4,803,240

□ 조치계획

○ 설계변경 심의위원회 개최 후 설계변경 계약 추진

- 상기와 같은 설계변경 내역에 대하여「설계변경 심의위원회」사전 심의를 개최하여 심의결과에 따라 설계변경 계약을 추진 공사에 만전을 기하고자 함

따로붙임  1. 설계변경 사전심의 요청서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.