문서번호	급수운영과-30900
결재일자	2017.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
최선보	강동길	전결 12/19 최철민
협 조

설계변경검토보고

(’17년 가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사)

2017. 12.

남부수도사업소

급수운영과

설계변경검토보고

(’17년 가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사)

「’17년 가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사」 업무수행 중

현장여건 변동으로 신규공종 발생 및 물량 증․감이 발생됨에 따라 설계변경을 시행

재계약 및 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명: ’17년 가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사

○ 공사개요

- 당 초: D=20~300㎜  L=2,312m

- 변 경: D=20~300㎜  L=2,204m

○ 공사기간: 2016. 4. 25. ~ 2017. 12. 26.

○ 계약금액: 금721,029,420원

○ 계 약 자: 씨에스이엔지(주) 대표 한청수

Ⅱ		설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

○ 지방자치단체 공사계약 일반조건(예규 제34호)“6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정

Ⅲ		설계변경 사유

○ 계약물량 변동(증ㆍ감) 발생

- 물량증가: 파쇄물기계상차(집하장)유압식백호우 0.7㎥외 83종

- 물량감소: 되메우기(기계100%)보통굴삭기(타이어)0.6㎥(야간+6차선지세)외 121종

○ 신규공종 및 신규자재 발생 : 야간공사시행으로 변동발생

- 신규공종: 토사절취〔견질토사(야간+6차선지세)〕외 16종

- 신규자재: 새들, 주철관용(슬립인죠인트) 100/20외 1종

Ⅳ		설계변경 요약

○주요 물량 증ㆍ감 내역

공 종	규 격	단위	수 량		금 액
			당초	변경
잔토처리 (0.7상차비별도)	24DT, 집하장->매립지(41.1km,금천)	㎥	*****	*****	*********
아스팔트 포장절단	100~150mm,(야간+6차선지세)	m	*****	*****	*********
타이튼 죠인트관 접합공	300mm(야간+6차선지세)	개소	***	***	**********
K.P 이탈방지압륜 접합	100mm(야간+6차선지세)	개소	***	*	**********
원형밸브실 설치공(기초PE)	D=100mm(야간)	개소		*	*********
원형밸브실 설치공(기초PE)	D=300mm(야간)	개소		**	*********
원형밸브실 설치공(기초CON)	D=100mm(야간+6차선지세)	개소	**	*	**********
원형밸브실 설치공(기초CON)	D=300mm(야간+6차선지세)	개소	**	*	***********
교통정리원	야간(2인1조)	인	***	**	***********
모래(환토재)시내도착도	쇄사 (부순모래)	㎥	*****	*****	*********

○ 계약금액 변경 내역

구 분	금 액(원)		증ㆍ감(원)	비 고
	당초	변경
순공사비	***********	***********	***********
간접노무비	**********	**********	**********
산재보험료	**********	**********	********
고용보험료	*********	*********	********
건강보험료	*********	*******	**********
노인장기요양보험료	*******	******	********
연금보험료	*********		**********
퇴직공제부금비	*********	*********	**********
산업안전보건관리비	**********	*********	**********
기타경비	**********	**********	********
건설기계대여대금	*********		**********
순공사원가	***********	***********	***********
일반관리비	**********	**********	**********
이 윤	**********	**********	**********
제요율제외공종	*********	**********	**********
공급가액	***********	***********	***********
부가가치세	**********	**********	**********
도 급 비	***********	***********	***********

Ⅴ		보고 및 처리의견

○ 설계변경 심의위원회 개최 후 설계변경계약 추진

- 상기와 같은 설계변경 내역에 대하여 사업소 자체 「설계변경 심의위원회」 사전 심의를 개최하여 심의결과에 따라 설계변경계약 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 설계변경 사전 심의 요청서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.