문서번호	토목부-26812
결재일자	2017.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	교량건설과장	토목부장
권순환	代김동현	전결 12/19 김영수

설계변경(전체 16회, 7차 1회) 검토 보고

《천호대로(광나루역) 확장공사》

2017.12.

도시기반시설본부

(토목부)

설계변경(전체 16회, 7차 1회) 검토 보고

《천호대로(광나루역) 확장공사》

‘지하차도 상부 경관개선’ 및 ‘중앙버스 전용차로 설치’에 대한 계약심사 결과 및 실정보고사항 반영 등『천호대로(광나루역) 확장공사 설계변경(전체16회, 7차1회) 도서 제출』에 대하여 검토하고 보고 드림

※ 관련근거 : 수성 제2017-3814호(2017.12.15.) ‘공사 설계변경 도서 제출’

1		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사

○ 규    모 :

- 도로확장 : 폭 6→10차로,  연장 900m (지하차도 580m 포함)

- 중앙버스 전용차로 설치 2,600m(정류장 5개소)

○ 공사기간 : ’10.10.11 ∼’17.12.31 (7차 : ’17.07.05∼’17.12.31)

○ 계약금액 : 전체 49,467백만원 (7차 : 4,500백만원)

○ 시 공 사 : 해동건설㈜ 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜ 수성엔지니어링

2		보고 내용

□ 설계변경 사유

○ 자치구 및 지역주민 요구사항을 반영한 ‘지하차도 상부 경관개선’ 및 천호대로 연장 ‘중앙버스 전용차로 설치’에 대한 계약심사 결과와 현장여건 변동에 따른 실정보고 승인 등 시공물량 증·감을 반영한 7차공사 및 전체공사 사업비 조정

○ ‘지하차도 상부 경관개선’ 및 ‘중앙버스 전용차로 설치’ 공사 등 추가공사에 따른 사업물량 증가와 자연석 경계석(관급자재)의 채굴량 감소로 인한 공급지연, 시공사의 공사추진시 지장물 이설 및 민원처리 미흡 등으로 공기연장이 불가피하며, 이에 따른 귀책 사유가 명확하지 않아 금차(7차)분에 대한 간접비 보상요구를 하지 않는다는 시공사 의견(각서 징구)을 받고 공사기간 연장 조치함이 타당함

□ 설계변경 현황

○ 변경 계약

(단위 : 천원)

구분	도 급 비			계약기간
	당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
전체	49,466,880	56,057,372	증) 6,590,492	2010.10.11. ~2017.12.31	2010.10.11. ~ 2018.06.30	증 181일
7차	4,500,000	6,817,763	증) 2,317,763	2017.07.05. ~2017.12.31	2017.07.05. ~ 2018.06.30	증 181일

○ 주요 변경내용

(단위 : 백만원)

변 경 내 용		공 사 비		증·감	관련문서
		당 초	변 경
1	지하차도 상부 경관개선공사	-	5,085	5,085	도기본-17-8897	'17.09.07
2	BRT 교통소통대책 수립 용역비	-	38	38	도기본-17-9071	'17.09.12
3	천호대로 연장 중앙버스전용차로 설치공사(BRT)	-	2,670	2,670	도기본-17-10193	'17.10.23
4	순성토 반입에 따른 토취장 선정	190	46	△144	도기본-17-10469	'17.11.01
5	BRT 교통안전시설물 설치 반영	100	224	124	도기본-17-10928	'17.11.13
6	BRT 경계석 및 보도블록 추가시공	58	72	14	도기본-17-11184	'17.11.21
7	L형옹벽 및 배수관 추가설치	6	33	27	도기본-17-11185	'17.11.21
8	BRT 버스정류장 PC패널 설치	-	419	419	도기본-17-11220	'17.11.22
9	옥내변전실 이전설치	-	394	394	도기본-17-11238	'17.11.23
10	BRT 띠녹지 조경식재 변경 및 수급방법 변경	58	67	9	도기본-17-11312	'17.11.24
11	기타 여건변경에 따른 반영	-	△24	△24	-	-
합 계		412	9,024	8,612

○ 주요 변경물량(전체16회, 7차1회)

공 종				단위	전 체			금 회(7차)
					당 초	변 경	증ㆍ감	당 초	변 경	증ㆍ감
1	토 공	흙깎기		㎥	300,927	300,927	-
		흙쌓기	다 짐	㎥	96,937	96,937	-	58,582	58,582	-
			비다짐	㎥	1,848	1,848	-
2	비탈면안정공	식생보호공		㎡	17,185	17,185	-	9,602	6,858	△2,744
		네일식생옹벽공		m	2,610	2,610	-
		숏크리트타설		㎡	14,308	14,308	-
3	배수및옹벽공	측 구 공		m	5,011	5,145	134	2,263	2,397	134
		우수맨홀		개소	39	39	-	15	15	-
		블럭식보강토		㎡	4,307	4,307	-
4	구조 물공	지하차도(파형강판)		m	520	520	-
		BOX형옹벽		m	620	620	-
		파형강판 라이닝보강		m	520	520	-	380	380	-
		도막시트복합방수		㎡	21,695	21,695	-	15,446	15,446	-
5	포장공	표 층(5㎝)		㎡	62,724	62,724	-	46,915	46,915	-
		중간층(7㎝)		㎡	35,060	36,687	1,627	14,536	16,163	1,627
		기 층(8~14㎝)		㎡	50,689	52,316	1,627	18,660	20,287	1,627
		보도포장(화강판석)		㎡	2,410	2,410	-
		보차도경계석		m	3,524	3,524	-	1,877	1,877	-
		도로경계석		m	5,459	5,459	-	2,932	2,932	-
		투수블록포장		㎡	2,693	2,693	-	1,408	1,408
6	부대공	암파쇄방호시설		m	1,412	1,412	-
		현장살수비		개월	64	64	-
		노면표시		㎡	6,298	6,298	-	1,269	1,269	-
		품질관리차량비		개월	76	76	-
		목재데크		경간	239	239	-	39	39	-
7	상수공	관 부 설		본	285	285	-
		구 조 물		개소	37	37	-
		라인스토핑		개소	18	18	-
		고철(고재)		ton	618	618	-	618	618	-
8	조경공	식재공사		주	95,885	95,885	-	-
		수목이식		주	19,381	19,381	-	-
9	경관 개선	식재공사(교목/관목)		주	-	72,728	72,728	-	53	53
		산벽옹벽		식	-	1	1	-	1	1
		나루폭포		개소	-	1	1	-
		도섭지		개소	-	1	1	-
		바닥분수		개소	-	1	1	-
		파고라		개소	-	6	6	-
10	중앙버스전용차로	기존구조물깨기		㎥	-	2,434	2,434	-	2,434	2,434
		경계석		m	-	3,724	3,724	-	3,724	3,724
		포장		a	-	373	373	-	373	373
		중앙버스정류소		개소	-	5	5	-	5	5

○ 공사비 변경(전체16회, 7차1회)

(단위 : 백만원)

공 종	전 체 분			금 회(7차)			비고
	당 초	변 경	증ㆍ감	당 초	변 경	증ㆍ감
1. 직 접 공 사 비	34,464	39,233	4,769	3,132	4,730	1,598
1) 토 공	5,248	5,160	△88	240	141	△99
2) 비탈면안정공	1,796	1,848	52	99	80	△19
3) 배수 및 옹벽공	2,020	2,028	8	203	207	4
4) 구 조 물 공	11,862	11,976	114	2,129	2,242	113
5) 포 장 공	748	757	9	278	288	10
6) 교통안전시설공	471	481	10	186	53	△133
7) 부 대 공	3,344	3,344	-	182	139	△43
8) 상 수 도 공 사	8,010	8,010	-	△185	△224	△39
9) 조 경 공 사	965	965	-	-	-	-
10) 경관개선공사	-	3,165	3,165	-	305	305
11) 중앙버스전용차로	-	1,499	1,499	-	1,499	1,499
2. 간 접 공 사 비	8,002	9,041	1,039	813	1,105	292
3. 미확정설계공종	179	179	-	95	95	-
4. 제요율제외적용	1,120	1,136	16	51	91	40
5. 물가변동액(K1=3.16%)	456	453	△3	-	-	-
6. 물가변동액(K2=3.42%)	660	655	△5	-	-	-
7. 물가변동액(K3=3.46%)	89	88	△1	-	-	-
공 급 가 액	44,970	50,785	5,815	4,091	6,021	1,930
8. 부 가 가 치 세	4,497	5,078	581	409	603	194
9. 원인자 부담금	-	7	7	-	7	7
10. 이 전 비	-	187	187	-	187	187
도 급 액	49,467	56,057	6,590	4,500	6,818	2,318
관 급 자 재	21,011	23,033	2,022	2,428	4,165	1,737
이 설 비	888	888	-	-	-	-
총 공 사 비	71,366	79,978	8,612	6,928	10,983	4,055

3		조치계획

○ ‘지하차도 상부 경관개선’ 및 ‘중앙버스 전용차로 설치’ 공사 등 계약심사 결과와 현장여건 변동에 따른 실정보고 등 물량 증·감을 반영한 전체 및 7차 계약금액 조정과 공기연장에 대한 감리단의 검토의견이 타당하므로 설계변경하여 사업추진에 차질이 없도록 조치코자 함

붙  임 : 1. 감리단 공문(검토의견서) 1부.

2. 설계변경 내역서(전체16회, 7차 1회) 각 1부.

3. 공사 예정공정표(전체16회, 7차 1회) 각 1부.   끝