시  민

문서번호	시설관리과-26598
보존기간	년
결재일자	2017.12.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	시설관리과장
최형진	代이한수	12/19 천성훈
협 조

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

【2017년 수유1동외 8개동 상수도공사】

2017. 12.

북부수도사업소

시설관리과

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

『2017년 수유1동외 8개동 상수도공사』 시행중 신규공종 및 시공물량 증․감 사항이 발생됨에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의 완료하고 결과를 보고함.

1. 일 반 현 황

가. 공 사 명 : 2017년 수유1동외 8개동 상수도공사(장게계속단가계약)

나. 공사개요

- ************************

- ************************

다. 공사기간 : 2017. 3. 29.~ 2017. 12. 15.(총부기기간 : 2017. 3. 29. ~ 2018.6.30.)

라. 도 급 비

- *******************

- *******************

(총부기금액 변동없음)

마. 도 급 자 : **************

2. 심의회 개최

가. 심의일정 : 2017년 12월 19일(화) 14:00

나. 심의장소 : 북부수도사업소 시설관리과

다. 심의위원 : 위원장(시설6급 박미영)

위원(시설7급 정성식, 시설7급 박상권, 시설7급 장병철)

3. 심 의 내 용

가. 수량변동 및 단가적용의 적정성 여부

나. 계약변동(증 ․ 감)수량 및 단가 낙찰률 적용 적정여부

다. 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

※ 신규공종 및 계약물량 증․감에 대한 설계변경 사항으로 단가계약공사의 특성상 발생

4. 설계변경 내역

구 분	당초(원)	변경(원)	증,감(원)	비 고
*****	***********	***********
****	***********	***********
*****	**********	**********

○ 신공종 및 시공물량 증․감에 따른 변경

가. 신공종 발생

- 잔토처리외 4개 공종

나. 공사 중 물량 증․감 사항 발생

- 물량증가 : 토사절취외 101개 공종 증가

- 물량감소 : 터파기(기계100%)보통외 59개 공종 감소

5. 심 의 결 과

가. 설계변경의 타당성 : 타당

나. 신규공종 발생유무 및 단가적용 타당성 : 적정

다. 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정

라. 계약변동(증․감)물량 계약단가 낙착율 적정 적용여부 : 적정

마. 각종 제반 규정 준수여부 : 준수

바. 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 적정

붙 임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 심의 신청서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 설계변경 심의 결과서 1부.  끝.