＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(청사증축관련 빗물이용시설 펌프 등 제조구매설치)시행

우리사업소에서 시행 중인『청사증축관련 빗물이용시설 펌프 등 제조구매설치』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 건    명 : 청사증축관련 빗물이용시설 펌프 등 제작구매 설치

나. 계약업체 :***************

다. 공사기간 : 2016.11.22.~2017.12.22

라. 설계변경 사유 : 신규공종 변경에따른 물량 증·감

- 행정지원과-32620(2017.12.19.)호 설계변경심의결과 반영)

마. 설계변경 금액 내역

구 분	당초(원)	변경(원)	증 감 (원)	비고
계약금액	9,196,000	9,938,300	742,300

바. 예산과목

- 상수도사업비용,영업비용,일반관리비,수선유지교체비,수선유지비

붙 임 : 1. 설계변경 심의위원회 개최결과 보고서 1부.

2  설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 계획서 1부.

4. 합의서 1부.

5.심의의결서 1부.  끝.

주무관	정호남		행정관리팀장	代민주홍		행정지원과장	12/19 이만기
협조자
시행	행정지원과-32656	(		)	접수		(		)
우	04744	성동구 고산자로10길 13[행당동]	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2622	/전송	02-3146-2678	/	beegess21@seoul.go.kr	/	부분공개(6)