문서번호	치수과-21998
결재일자	2017.12.19.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	치수과장	안전건설교통국장
이은주	김익기	송기민	12/19 代이상수
협 조

- 도로함몰 예방 노후하수관로 정비공사(성북구 2권역) -

사업추진 계획 검토 보고

2017. 12.

안전건설교통국

(치  수  과)

- 도로함몰 예방 노후하수관로 정비공사(성북구 2권역) -

사업추진 계획 검토 보고

우리 구에서 시행중에 있는 『도로함몰예방노후하수관로정비공사(2권역)』 의 공사물량중 기 보수완료, 사유지내 관로 등 작업불가한 위치는 사업  구간에서 제외하고 관로의 노후 및 파손, 다수동공 발생으로 추가보수 및 굴착공사 불가구간에 대해 비굴착보수 시행 등 사업계획 변경사항이 발생하였음을 보고함.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 도로함몰 예방 노후하수관로 정비공사(성북구 2권역)

공사기간 : 2017.07.24. ~ 2017.12.31.

계 약 자 : ㈜아르케포럼건설  대표 오진석

총공사비 : 950,290천원

- 도급비 629,124천원, 관급비 143,500천원, 이전비 177,666천원(폐기물포함)

공사내용 : 하수관로 개량

- 전체굴착 : D=300~1,650mm, L=215.8m

- 부분굴착 : D=300~1,650mm, 99개소

- 기타 부대공 1식

Ⅱ		보 고 내 용

현장조사 결과 일부구간 기 보수완료 및 공사불가

구 분	보수물량	제외물량	제외 사유
부분보수	99개소	36개소	기보수 : 14개소 ․ 관로개량, 비굴착 보수 기시행 - 빗물받이 연결관으로 보수 제외 : 7개소
			공사불가 : 15개소 ․ 상가밀집지역으로 민원발생, 사유지내 통과
전체보수	215.8m	161.4m	- 공사불가 : 4개구간 ․ 도로포장완료로 굴착불가, 사유지내 통과 등

공사구간 인접지역에 관파손, 부식, 이음부 이격, 균열 등으로 배수불량, 도로침하 우려가 있는 노후하수관로 추가 보수 및 일부 부분보수 구간중 전체보수가 불가피 함.

연번	위 치	변경내용	사 유	비 고
1	돈암동13-7등 48개소	공사물량 증가	관파손, 이음부 불량, 균열 등으로 인접구간 추가보수 시행
2	선잠로9-10(1개소)	부분보수→전체보수	기존관이 CP관이며 파손, 균열, 이음부 이격으로 전체보수 시행
3	성북로18길19(2개소)	부분보수→전체보수	기존관이 CP관이며 파손, 균열, 이음부 이격으로 전체보수 시행
4	성북로4길69(2개소)	부분보수→전체보수	기존관이 CP관이며 파손, 균열, 이음부 이격으로 전체보수 시행

관로가 노후하나 현황여건상 굴착공사 불가하여 비굴착보수 시행 검토

연번	위 치	검토 내용	사 유
1	삼선교로4	부분굴착→비굴착 (2.5m→1.0m)	도로횡단구간 양방향통제 불가로 비굴착 시행
2	삼선교로14길29	부분굴착→비굴착 (2.5m→1.0m)	도로횡단구간 양방향통제 불가로 비굴착 시행
3	삼선교로39	부분굴착→비굴착 (2.5m→1.0m)	도로횡단구간 양방향통제 불가로 비굴착 시행
4	삼선교로14길15	부분굴착→비굴착 (2.5m→1.0m)	도로횡단구간 양방향통제 불가로 비굴착 시행
5	성북로4길177	부분굴착→비굴착 (2.5m→1.0m)	지장물(상수관로)로 인해 굴착불가하여 비굴착 시행
6	성북로168	부분굴착→비굴착 (2.5m→1.0m)	지장물(상수관로)로 인해 굴착불가하여 비굴착 시행
7	삼선교로40	전체굴착→비굴착 (4.2m→1.0m)	도로횡단 및 지장물로 인해 굴착불가하여 비굴착 시행

[ 물량변경 내역 ]

공 종	규 격	단위	시공물량				비고
			당초	변경후	증 ․ 감
					증	감
전체굴착	D300~1,650mm	m	215.8	311.0	95.2		물량변경
부분굴착	D300~1,650mm	개소	99	52		47	물량변경
비굴착보수	D=450㎜~1,500㎜	개소	-	7		7	신규공종

Ⅲ		사업비 변경 내역

물량증감에 따른 사업비 변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증 ․ 감		비 고
			증	감
총 공 사 비	950,290,680	547,918,560		402,372,120
도 급 비	629,124,680	416,130,000		212,994,680
관 급 비	143,500,000	78,825,560		64,674,440
이 전 비	143,222,000	16,322,000		126,900,000
폐기물 처리비	34,444,000	36,641,000	2,197,000

Ⅳ		검 토 의 견

하수관로 개량 및 비굴착보수 등 기 보수완료된 구간 및 공사불가 구간은 본 사업에서 제외함.

부분굴착 구간 중 하수관로 노후, 파손, 다수 동공발생 등 긴급보수를 요하는 『돈암동13-7등 48개소』에 대하여 인접구간 추가보수 시행하여 도로함몰 등 재난사고 예방함.

관로가 노후하나 현황여건상 굴착공사 불가한 구간에 대하여 비굴착보수 시행이 타당함.

삼선교로10길10 등 19개 구간은 지장물(한전주, 상수도 등), 사유지 통과, 영업점포 민원 등으로 금회사업에서 제외되었으나 향후 재검토하여 2018년 도로함몰 예방 노후관로 정비사업 시행 시 낙찰차액 등 집행잔액을 활용하여 비굴착 시공 등 재추진함이 타당함.

Ⅳ		조 치 계 획

상기 변경내용에 대하여 대하여 도급업체에 작업지시하여 시공하고 신규공종 및 물량증가에 따른 공사비 변경사항은 추후 설계변경에 반영하여 정산처리 하고자 함.

붙 임 : 1) 공사대상구간 현황검토 내역 1부.

2) 공사구간 변경 세부내역 1부.

3) 정비불가 현황 예시 1부.  끝.