함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰(*****************************************)

1. 우리 사업소에서 시행하고 있는「2017년 중랑구, 동대문구 관내 상수도공사(단위공사) 건설폐기물 처리용역」에 대하여 설계변경을 시행하고 아래와 같이 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명: *****************************************

나. 도 급 자: ****************

다. 용역기간: 2017.04.19.~2017.12.31.

라. 용역금액 변경 내역

구 분	금 액(원)		증․감(원)	비 고
	당 초	변 경
총용역비	124,691,000	141,372,000	증)16,681,000	물량증·감 계약금액 변 경
공급가액	113,355,455	128,520,000	증)15,164,545
부가가치세	11,335,545	12,852,000	증)1,516,455

마. 용역금액 변경 내역: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

붙 임: 1) 설계변경 관련 문서 각 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	박상현		시설관리팀장	박종일		시설관리과장	12/19 최명익
협조자
시행	시설관리과-35702	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동) 동부수도사업소	/
전화	02-3146-2793	/전송	02-3146-2839	/		/	부분공개(5)