아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(북악스카이웨이1교 개축공사 건설폐기물처리용역)

1. 교량안전과-23085호(2017.12.19.)와 관련입니다.

2. 우리시에서 추진 중인『북악스카이웨이1교 개축공사 건설폐기물처리용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 북악스카이웨이1교 개축공사 건설폐기물처리용역

나. 용역기간 : 2017.04.03. ~ 2017.12.31

다. 도 급 자 : (주)도성개발 대표 박진영

라. 준공기한 변경 내용

- 당초 : 2017.04.03. ~ 2017.12.31

- 변경 : 2017.04.03. ~ 2018.10.31

마. 귀책사유 : 발주처

바. 연기사유 :

- 보상 및 이주가 원활히 이루어지지 않아 사업부지 미확보로 공사 착공이 지연됨에 따라 부득이 관련 규정에 따라 용역기간이 연장이 필요함.

사. 예산과목

- 교량관리, 일반교량관리, 북악스카이웨이1교 개축공사, 시설비 및 부대비, 시설비 (‘16 명시이월 예산)

붙임 1. 준공기한 연기 검토 보고 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
★주무관	정성민		강북일반교량팀장	손창익		교량안전과장	12/19 한유석
협조자
시행	교량안전과-23126	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1969	/전송	02********9	/	phj4ever@seoul.go.kr	/	대시민공개