함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(공릉배수지(5,6지)내부방식공사)

설계변경 계약금액 조정 심의결과에 의거 우리사업소에서 시행중인 『공릉배수지       (5,6지)내부방식공사」에 대하여 설계변경 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 공릉배수지(5,6지)내부방식공사                                      나. 도 급 자 : ****************

다. 계약기간 : 2017.06.26 ~ 2017.12.22.

라. 변경내용 : 물량 증ㆍ감 및 신공종 발생,보험료(국민연금,노인,건강) 미정산

마. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비-22202

바. 설계변경 내역                                                                                                                                                                                                     (단위:원)

구 분	당 초	변 경	비 고(증․감)
도 급 액	*************	*************	*************

첨부 : 1. 설계변경시행 품의서 1부.

2. 설계변경사유서 1부.

3. 계약금액 조정결과 1부.

4. 설계변경(조정) 내역서 및 산출서 1부.

5. 합의서 1부.  끝.

							급수운영과장
주무관							최용진			급수운영과장					12/19 장종욱
협조자
시행			급수운영과-28472									(						)		접수											(						)
우	01137																				/
전화		02-3146-3342						/전송			02-3146-3389					/													/	부분공개(7)