투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(정산) 계약의뢰-2016년 한강 이촌권역 자연성회복 통신공사

1. 우리 본부에서 추진중인 『2016년 한강 이촌권역 자연성회복 통신공사』에  대하여 아래    와 같이 설계변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2016년 한강 이촌권역 자연성회복 통신공사

나. 공사기간 : 2016. 04. 06 ∼ 2017. 12. 20

다. 도 급 액 : 134,519,500원

라. 도 급 자 : ㈜국제비엠에스    대표 윤도선

마. 설계변경 사유

- 신규공정 및 현장여건 변동에 따른 물량 증ㆍ감내역 발생

바. 설계변경 금액                                                     (단위:원)

구 분	당초	변경	증ㆍ감	비고
도급비	134,519,500	124,260,000	감) 10,259,500

사. 예산과목

- 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 자연성 회복, 이촌권역 자연성

회복, 시설비100-401-01

첨부 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 공단공문 1부.

3. 설계변경내역서 1부. 끝.

	생태공원과장
주무관	임이환		생태공원과장	12/19 최병언
협조자	총무과장	박병현
시행	생태공원과-3490	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3780-0725	/전송	3780-0740	/		/	부분공개(6,7)