투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	남산 회현자락 한양도성 보존,정비 및 조성공사 혼합폐기물처리용역 설계변경 시행

1. 시설과-7841(2017.12.18.)호와 관련입니다.

2. 『남산 회현자락 한양도성 보존,정비 및 조성공사』 혼합폐기물처리 용역과 관련 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 남산 회현자락 한양도성 보존,정비 및 조성공사 혼합폐기물처리용역

나. 용역기간 : 2016. 11. 24. ~ 2017. 12. 30.

다. 위    치 : 중구 회현동 1가 100-177번지 일대

라. 변경내용 : 혼합폐기물 운반 및 처리 물량 증가(35톤 → 56톤)

마. 도 급 비 : 금3,942,500원(금삼억사천팔백칠십팔만육천원)

********************************

사. 변경금액

구 분		도 급 비 (원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
총용역비		3,942,500	6,300,000	2,357,500
도급비	공 급 가 액	3,584,091	5,727,273	2,143,182
	부가가치세	358,409	572,727	214,318
	합 계	3,942,500	6,300,000	2,357,500

아. 예산과목 : 푸른도시국 공원조성과, 생활권 공원확충, 노후공원 재조성, 남산회현지구 정비, 시설비

붙 임    1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.

조경팀장	이무림		시설과장	12/19 김재균
협조자	재무팀장	김기중
시행	시설과-7855	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 4층(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5966	/전송	02-3783-5969	/		/	부분공개(6)