문서번호	시설관리과-35630
결재일자	2017.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
박상현	박종일	12/19 최명익

설계 변경 시행 보고

(2017년 중랑구, 동대문구 관내 상수도공사(단위공사) 건설폐기물 처리용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.12

동부수도사업소

(시설관리과)

설계 변경 시행 보고

(2017년 중랑구, 동대문구 관내 상수도공사(단위공사) 건설폐기물 처리용역)

우리 사업소에서 시행중인「2017년 중랑구, 동대문구 관내 상수도공사(단위공사) 건설폐기물 처리용역)」과 관련하여 본부 재무회계과로부터 시공물량 증감 및 신규공종 발생 등에 따른 계약금액 조정 검토를 완료하고 다음과 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

Ⅰ		현 황

❍ 용 역 명: 2017년 중랑구, 동대문구 관내 상수도공사(단위공사) 건설폐기물 처리용역

❍ 도 급 자: 광일토건환경(주) 박노일

❍ 용역기간: 2017.04.25.~2017.12.31.

Ⅱ		설계 변경 내용

❍ 용역시행에 따른 물량 증감

- 폐기물 운반량: 2,544㎥ → 2,081㎥(감 463㎥)

- 폐기물 처리량: 5,425톤 → 4,830톤(감 595톤)

❍ 폐아스콘 재생처리 불가로 중간처리로 변경

Ⅲ		계약금액 조정 결과

구 분	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증․감
총용역비	124,691,000	141,372,000	16,681,000
공급가액	113,355,455	128,520,000	15,164,545
부가가치세	11,335,545	12,852,000	1,516,455

Ⅳ		조 치 계 획

❍ 상기와 같이「2017년 중랑구, 동대문구 관내 상수도공사(단위공사) 건설폐기물 처리용역」에 대하여 본부 재무회계과 조정 내용을 반영하여 설계변경 시행하고자 합니다.

붙임: 1) 계약금액 조정 결과 통보 1부.

2) 계약금액 검토 결과서 1부.

3) 변경 내역서(당초, 변경) 각 1부.  끝.