문서번호	시설보수과-9114
결재일자	2017.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	12/19 이인근
협조
	주무관		최승룡

『소화조 보수공사 건설폐기물 처리용역』

설계변경 및 준공 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12

중랑물재생센터

(시설보수과)

『소화조 보수공사 건설폐기물 처리용역』

설계변경 및 준공 보고

우리센터에서 추진 중인 『소화조 보수공사 건설폐기물 처리용역』이 완료되었기에 아래와 같이 설계변경을 시행 및 준공 하고자 합니다.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 소화조 보수공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역기간 : 2017. 11. 24 ~ 2017. 12. 31

○ 도 급 액 : 금11,564,000원

○ 도 급 자 : (주)동성 대표 임희향, 서울ENT㈜ 대표 안성효

(주)애니테크 대표 임병곤

○ 용역개요 : 폐콘크리트 174.63톤, 폐합성수지 10.90톤

□ 설계변경 사유

○ 건설폐기물 종류별 수량 감소

□ 설계변경 내용

○ 용역금액

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
총용역비		11,564,000	1,413,000	감) 10,151,000
도급비	공급가액	10,512,728	1,284,545	감) 9,228,183
	부가가치세	1,051,272	128,455	감) 922,817
	계	11,564,000	1,413,000	감) 10,151,000

○ 설계변경 주요 내용

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증감
폐콘크리트 처리	콘크리트	Ton	173.63	0	감) 173.63
폐합성수지 처리	소 각	Ton	10.90	3.77	감) 7.13

□ 조치계획

○ 상기 내용에 대하여 설계변경하고 정산코자 합니다.

붙  임 : 1. 설계변경사유서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.