문서번호	급수운영과-30949
결재일자	2017.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
최선보	강동길	전결 12/20 최철민
협 조

설계변경 심의 결과 보고

[가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사]

2017. 12.

남부수도사업소

급수운영과

설계변경 심의 결과 보고

[가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사]

「가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사」 에 대하여 다음과 같이 설계변경  심의위원회 심의를 마치고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사

공사개요

- 당 초 : D=20~00㎜  L=2,312m

- 변 경 : D=20~300㎜ L=2,204m

공사기간 : 2017.4.25. ~ 2017.12.26.

도 급 액

**************************

**************************

계 약 자 : 씨에스이엔지(주) 한청수

Ⅱ		설계변경 심의위원회 개최

일  시 : 2017년12월19일(화) 17:00

장  소 : 3층 급수운영과 사무실

위원장 : 급수운영과장 최철민

위  원 : 시설관리과 권승계, 강동철, 서규석

간  사 : 급수운영과 주무관 강동길

Ⅲ		설계변경 위원회 검토 내용

설계변경 타당성 : 타당함

신규공종 및 계약변동(증․감)물량 계약단가 적정 적용여부 : 적정

제잡비 적정 산정 및 적용 적성성 : 적정

각종 제반규정 준수여부 : 준수

Ⅳ		설계변경 세부 내역

주요 물량 증ㆍ감 내역

공 종	규 격	단위	수 량		금 액
			당초	변경
잔토처리 (0.7상차비별도)	24DT, 집하장->매립지(41.1km,금천)	㎥	3,147	3,621	*********
아스팔트 포장절단	100~150mm,(야간+6차선지세)	m	3,101	4,724	*********
타이튼 죠인트관 접합공	300mm(야간+6차선지세)	개소	362	295	**********
K.P 이탈방지압륜 접합	100mm(야간+6차선지세)	개소	226	7	**********
원형밸브실 설치공(기초PE)	D=100mm(야간)	개소		9	*********
원형밸브실 설치공(기초PE)	D=300mm(야간)	개소		17	*********
원형밸브실 설치공(기초CON)	D=100mm(야간+6차선지세)	개소	15	2	**********
원형밸브실 설치공(기초CON)	D=300mm(야간+6차선지세)	개소	27	3	***********
교통정리원	야간(2인1조)	인	156	77	***********
모래(환토재)시내도착도	쇄사 (부순모래)	㎥	1,469	1,869	*********

계약금액 변경 내역

구 분	금 액(원)		증ㆍ감(원)	비 고
	당초	변경
순공사비	***********	***********	***********
간접노무비	**********	**********	**********
산재보험료	**********	**********	********
고용보험료	*********	*********	********
건강보험료	*********	*******	**********
노인장기요양보험료	*******	******	********
연금보험료	*********		**********
퇴직공제부금비	*********	*********	**********
산업안전보건관리비	**********	*********	**********
기타경비	**********	**********	********
건설기계대여대금	*********		**********
순공사원가	***********	***********	***********
일반관리비	**********	**********	**********
이 윤	**********	**********	**********
제요율제외공종	*********	**********	**********
공급가액	***********	***********	***********
부가가치세	**********	**********	**********
도 급 비	***********	***********	***********

Ⅴ		처리의견

본 공사는 공사시행에 따른 신규공종과 신규사급자재 및 물량 증ㆍ감이

발생한 사항으로 자체 설계변경 심의 결과 적정한 것으로 심의 완료되어,

변경 계약의뢰하여 설계변경 시행코자 함.

붙임  1. 설계변경 사전 심의 요청서 1부

2. 심의 의견서 사본 1부

3. 설계변경내역서 1부.  끝.