함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사)

1. 우리사업소에서 시행 중인 「가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사」 에 대하여 설계     변경 심의위원회 심의를 완료하고 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명: 가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요┎ 당초: D=20~300㎜  L=2,312m

┖ 변경: D=20~300㎜  L=2,204m

다. 공사기간: 2017.4.25. ~2017.12.26.

라. 계 약 자: 씨에스이엔지(주) 대표 한청수

마. 설계변경 내역                                               (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증.감	비 고
도 급 비	721,029,420	653,576,000	감) 67,453,000

바. 설계변경 사유: 공종별 계약물량 증ㆍ감 및 신규 공종 발생

사. 예산과목: 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비(노후상수도관(배급수관)정비)

붙임  1. 설계변경 심의 결과보고 1부

2. 설계변경 사전 심의 요청서 1부

3. 설계변경 심의 의견서(스캔)  1부

4. 설계변경 내역서 1부

5. 합의서 1부.  끝.

주무관	최선보		주무관	강동길		급수운영과장	代이일로		남부수도사업소장	12/20 전영석
협조자	주무관	이철		주무관	심숭금		주무관	정은희
행정지원과장	代신민철
시행	급수운영과-30968	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4545	/전송	02-3146-4589	/	csb8601@seoul.go.kr	/	부분공개(5)