	중부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 업무지시(한남테니스장 송배수관)

우리사업소에서 시행하고 귀 공단에서 감독중인 「한남테니스장~동국대입구역 송배수관 정비공사」와 관련 준공기한 연기에 따른 업무지시를 아래와 같이 통보하오니 공사 진행에 차질이 없도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 한남테니스장~동국대입구역 송배수관 정비공사

2. 연기사유 : 암발생으로 인한 절대공기 부족

3. 귀책소재 : 중부수도사업소

4. 공사기간

가. 당 초 : 2017.05.22. ~ 2017.12.27.

나. 변 경 : 2017.05.22. ~ 2018.06.28.

붙 임 : 준공기한 연기 방침 1부.  끝.

	중부수도사업소장
★주무관	이상현		주무관	代최성태		급수운영과장	전결 12/20 代박장진
협조자
시행	급수운영과-29363	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)중부수도사업소 3층 급수운영과	/
전화	02-3146-2160	/전송	02-3146-2189	/		/	부분공개(7)