문서번호	정수시설과-5004
결재일자	2017.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김현철		김석정	12/20 신동호
협 조
	주무관			최양교
	주무관			서광호
	주무관			장현순
	주무관			김인준

【2017 뚝도아리수정수센터 전기설비보수공사(연간단가)】

설계변경 심의 위원회 개최

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

【2017 뚝도아리수정수센터 전기설비보수공사(연간단가)】

설계변경 심의 위원회 개최

『2017년 뚝도아리수정수센터 전기설비보수공사(연간단가)』시행 중 신규 공종 및 시공 물량 증․감 사항이 발생됨에 따라 설계변경에 앞서 그 내용을 심의코자 함

□ 일반현황

◯ 공 사 명 : 2017년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)

◯ 공사개요

구 분	당 초	변 경	비고
케이블 포설	0.6/1kV F-CV 3C 6㎟ 100m(옥외)	0.6/1kV F-CV 3C 6㎟ 150m(옥외)
전선관 배관	아연도 강관 22mm × 50m(옥내)	아연도 강관 22mm×3.6m(옥내)
분전반	조명분전반 1면	조명분전반 및 각종 전원분전반 8면
정수과 지원	-	가성소다 중화시설 누출 감시장치 및 mixing탱크 레벨계 설치 등 1식
행정과 지원	-	정문 LED 투광등 설치 등 1식
기 타	-	1침전지 퇴수밸브실 배수펌프 조작반 설치(3면) 등

- 신규공종 및 물량 증감 발생(설계변경 사유서 참조)

◯ 공사기간 : 2017. 4. 20 ~ 2018. 3. 31

◯ 계약금액

- 당초 : 일억삼천칠백일십오만구천육백삼십원(￦137,159,630원)

- 변경 : 일억이천일백만원(￦121,000,000원)

◯ 계 약 자 : (주)중부전기건설 대표 조 중 건

□ 심의 위원회 개최

◯ 심의일정 : 2017년 12월 20일(수) 16:00 ~17:00

◯ 심의장소 : 뚝도아리수정수센터 정수시설과

◯ 심의위원장 : 정수시설과장 김석정

◯ 심의위원 : 공업6 최양교, 공업6 서광호, 시설7 장현순, 공업7 김인준

□ 심의내용

◯ 계약물량 증․감에 대한 설계변경 사항으로 단가계약공사의 특성상 발생

- 수량변동 및 단가 적용의 적정성 여부

- 신규 공종 발생 수량 단가의 낙찰율 적용 적정 여부

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

□ 설계변경내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	124,690,573	110,000,000	14,690,573
부가가치세	12,469,057	11,000,000	1,469,057
도급금액	137,159,630	121,000,000	16,159,630

◯ 신규공종 및 시공물량 증․감에 따른 변경

- 신규 공종 발생 : 터파기 등 47 공종 발생, 낙찰율 88.433% 적용

- 공사 중 물량 감소 : 접지 동봉 설치 등 73 공종 발생

- 공사 중 물량 증가 : 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(옥내) 등 11공종 발생

□ 행정사항

◯ 위와 같이 설계변경 사항에 대하여 적법성 여부를 검토 및 심의하고,

◯ 심의 검토경과에 의거 설계변경 반영조치코자 합니다.

붙임 1. 설계변경 내역서(신규공종 및 수량산출서 포함)  1부

2. 설계변경 사유서  1부

3. 설계변경 심의신청서  1부.   끝.